서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	"2015년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-1공구" 설계변경(2회) 시행

1. 교량안전과-5330(2015.11.20.)호 및 대한감본15-481(2015.11.16.)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행중인 “2015년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-1공구”에 대해 아래와 같이 설계변경을 시행하고자합니다.

○ 사 업 명 : 2015년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-1공구)

○ 사업기간 : 2015. 3. 30 ~ 2015.12.31

○ 시 행 자 : ㈜ 이젠리버텍

○ 예산과목 : 교량관리, 한강교량관리, 한강교량일상유지보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 변경내역

구분	당초	변경	증,감
도급비	2,116,829,000원	2,685,435,810원	568,606,810원

○ 설계변경사유 : 작업수량 증,감 및 신규공종 반영

따로붙임 : 1) 변경내역서(2회) 및 설계변경보고서(책임감리)

2) 실정보고 검토보고서 1부. 끝.

	교량안전과장
주무관	백운경		교량관리팀장	유제천		교량안전과장	11/20 이용심
협조자
시행	교량안전과-5339	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	300-8452	/전송	300-8459	/		/	대시민공개