문서번호	급수운영과-20198
결재일자	2015.11.20.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김희철	임인택	11/20 전명수
협 조

준공기한 연기 보고(신설146,147,148)

명에 의거 2015년 석촌동외 11개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 보고합니다.

1. 보고 요지 : 급수공사 준공기한 연기

2. 공사 현황

지시번호	공사위치	공사개요	당초 공사기간	변경 공사기간
신설-146	송파동 149-5 가동	D=40㎜, L=4m	2015.11.10~2015.11.20	2015.11.10.~2015.12.7
신설-147	송파동 149-5 나동	D=40㎜, L=4m	2015.11.10~2015.11.20	2015.11.10.~2015.12.7
신설-148	송파동 149-5 다동	D=40㎜, L=4m	2015.11.10~2015.11.20	2015.11.10.~2015.12.7

3. 연기사유

- 신축건물 공사 현장 공사지연(가설물 미철거)으로 인해 급수공사 연기 요청

4. 지체상금 부과여부 : 미부과

5. 조치내용

상기와 같은 사유로 급수공사일정 연기를 요청함에 따라 변경된 공사 기간을 거승건설㈜ 대표 한영주에게 통보코자 합니다.  끝.