문서번호	서울특별시아동복지센터-15429
결재일자	2015.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서무팀장	아동복지센터소장
공희옥		이부열	11/20 이순덕
협조

CCTV 보강 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시

아동복지센터

CCTV 보강 설치 계획

우리 센터에서 운영중인 CCTV 시스템에 실내 및 실외 CCTV 카메라를 보강 설치하여 센터 보안 및 안전 관리를 강화하고자 함.

Ⅰ		현황 및 문제점

❍ 장비 설치 현황

- CCTV 카메라(실내용) : 13대

구분	대	설치위치
청사1층	7	정문(밖), 정문(복도), 중문, 상담실, 한울방
청사2층	3	학대예방센터 출입구, 상담실, 장애인이동통로
다사랑관	3	현관앞, 복도, 만화방

- DVR(디지털 영상녹화기) : 1대

- 감시 모니터 : 5대(당직실․상담팀․학대예방팀․생활지원팀․다사랑관)

❍ 문제점

- 청사 출입구 중 후문에만 CCTV가 설치되어 있지 않아 안전 및 보안의 사각지대 존재

- 센터 정문 및 후문 출입구에 CCTV를 설치하여 센터 출입자의 동향 파악과 긴급사항 발생 시 빠른 대응 필요

Ⅱ		CCTV 보강 설치 계획

❍ 감시카메라 설치 : 3대 (실내용 1대, 실외용 2대)

- 설치예정위치

위치	설치 예정 위치	설치대수
청사1층	청사1층 남자화장실 옆 후문	실내카메라 1대
센터출입구	청사 밖 보행로(정문, 후문감시)	실외카메라 2대

❍ DVR(영상 녹화기) 및 모니터

- 기존의 설치장비 통합사용

Ⅲ		소요예산

❍ 예 산 액 : 2,411,750원

❍ 예산과목

- 아동복지서비스증진, 아동복지센터운영, 아동복지센터운영및아동보호전문기관확대, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

❍ 세부내역

구 분	산출내역	소요예산	비 고
기기비용	실외용 돔카메라 2대(브라켓포함)	390,000
	실내용 돔카메라 1대	100,000
설치공사비	재료비, 노무비, 경비, 일반관리비	1,702,500
소 계		2,192,500
부가가치세		219,250
합 계		2,411,750

Ⅳ		추진일정

❍ CCTV 보강 설치 행정 예고  : ‘15. 11. 24 ~ 12. 13(20일간)

❍ 카메라 설치 및 모니터 연결  : ‘15. 12. 14 ~ 12. 18

Ⅴ		행정사항

❍ 물품관리시스템에 CCTV 카메라 등록․관리

별첨 : 1. CCTV 설치 산출 기초 조사서 1부.

2. CCTV카메라 설치현황 및 예정지점 1부.  끝.