문서번호	교량안전과-5330
결재일자	2015.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
백운경		유제천	11/20 이용심
협조

『2015년 한강교량일상유지보수공사-1공구』 설계변경(2회) 시행보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

교량안전과

『2015년 한강교량 일상유지보수공사-1공구』

설계변경(2회) 시행보고

우리시와 도급계약을 체결하고 시행중인 『2015년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-1공구』 추진 중 책임감리원으로부터 설계변경(2차)  보고가 있어 이에 대한 시행 보고 사항 임.

공사개요

공 사 명 : 2015년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-1공구

공사기간 : 2015.03.30 ~ 2015.12.31

공사개요 : 교면포장 및 방수, 신축이음 보수, 균열보수, 단면보수 등

계약금액 : ￦2,116,829,000원

시 공 사 : ㈜이젠리버텍 대표 조보연

감    리 : ㈜대한콘설턴트, (주)신명건설기술공사

설계변경 내용

변경공사비

구 분		공 사 금 액(천원)			비 고
		당 초	변 경	증․감
전체사업비	도 급 비	2,116,829	2,685,958	(증)568,607	내역 (물량) 변경
	관 급 비	200,440	281,639	(증)81,199
	이 전 비	100,400	52,635	(감)47,765
	계	2,417,669	3,019,710	(증)602,041

설계변경 사유

-  작업지시(8차~18차)에 의한 수량 증․감 및 신규공종 반영

-  2015년 한강교량 일상유지보수공사 하반기 추진계획(교량안전과-2110,‘15.10.05)

○ 주요 작업지시 현황

- 반포대교 신축이음장치교체 : 28.8m(작업지시 12차)

- 잠실대교 교면방수 및 교량포장 : 384㎡(작업지시 13차)

- 광진교외 8개교량 난간 및 방호책 세척 : 79,696m (작업지시 14차)

- 반포대교 신축이음장치 후타재 보수 : 30.0m(작업지시 15차)

- 잠실, 원효, 양화대교 수중단면복구 : 39.28㎡(작업지시 16차)

- 동호대교 자갈포설 및 다짐 : 26.1㎡(작업지시 17차)

- 영동대교 신축이음장치 교체 : 7m(작업지시 18차)

《 주요 수량 변경 》

공종	규격	단위	당초 (수량)	변경 (수량)	증.감 (수량)	비고
철거공	깨기	㎥	179.60	35.34	-144.26
교면보수공	아스팔트포장	a	91.09	80.29	-9.80
방수공	도막식	㎡	7,812.00	7,829.0	17.0
신축이음보수공		m	94.0	128.6	34.6
상판보수공		㎡	8.60	3.6	-5.0
강재보수공	잡철물제작및설치	ton	1.21	2.01	0.8
도장보수공	강재도장	㎡	6,834.00	124.25	-6,709.75

○ 주요 신규공종 반영

- 신축이음장치교체(NWJ NO.80) : 반포대교 28.8m

- 신축이음장치교체(주간,120mm및 160mm) : 잠수교 72.0 m

- 교량인상 및 인하 (2000KN) : 2개소

- 스텐차단봉 및 차단줄 : 잠수교 차단시설1 식

- M패칭보수(양측,야간) : 30.0m

- 수중단면복구 (USM공법-팻칭) : 잠실, 원효, 양화대교 39.28 ㎡

- 수중촬영(조사,보수,검사) : 잠실, 원효, 양화대교 9 기

- 토사절취 ,자갈포설 및 다짐 : 동호대교 26.1㎥

○ 제경비 변경

- 4천만원이상 작업지시건에 대한 산업안전보건관리비 반영

・12차 및 13차, 14차, 16차 작업지시 적용

책임감리원 설계변경 보고에 대한 의견

책임감리원이 제출한 설계변경 사항은 적법하게 시행된 것으로 판단되어 책임감리원 보고 내용과 같이 설계변경 시행코자 함.

첨 부 : 1) 책임감리원 설계변경 보고 1부.

2) 설계변경내역서 1부.

3) 작업지시별 현황 1부. 끝.