투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	포코건설(주) 대표 장윤순
(경유)
제목	'보라매공원 내 남부장애인복지관 담장개선공사' 실정사항 승인 통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 포코건설(주) 제20*******02(2015.11.18.)호와 관련하여 실정보고사항에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 공사 추진 및 현장 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 현장실정사항

현황 및 문제점	검토의견	검토결과
□신설 담장이 철근콘크리트 외면치장벽돌쌓기로 계획되어 있으나, 기존 담장이 치장벽돌쌓기로 되어 있어 공법 변경 필요	□기존 담장과 동일한 공법으로 변경 필요 - 철근콘크리트 외면치장벽돌쌓기 : 20m→0m - 1.5B 치장벽돌쌓기 : 0m→20m	승인

끝.

	동부공원녹지사업소장
주무관	최지효		시설과장	11/20 진병규
협조자	주무관	백운도
시행	시설과-5955	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	02-2181-1195	/전송	02-2181-1199	/	charity3@seoul.go.kr	/	대시민공개