문서번호	시설과-5950
결재일자	2015.11.20.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장
최지효	11/20 진병규
협 조
	주무관		代최지효

『보라매공원 내 남부장애인복지관 담장개선공사』실정보고

2015. 11.

동부공원녹지사업소

(시   설   과)

『보라매공원 내 남부장애인복지관 담장개선공사』실정 보고

우리 사업소에서 추진 중인 『보라매공원 내 남부장애인복지관 담장개선공사』와 관련하여 시공사로부터 현장실정보고가 접수되어 아래와 같이 보고 드림

【포코건설(주) 제20*******02호(2015.11.18.)】

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 보라매공원 내 남부장애인복지관 담장개선공사

❍ 공사기간 : 2015. 11.9. ～ 11.28

❍ 총공사비 : 18,676,500원

❍ 도 급 자 : 포코건설㈜ 대표 장윤순

❍ 공사내용

- 남부장애인복지관 담장 부분 철거 및 신설(후퇴 설치) 20m

- 기존 쓰레기분리수거장 철거 및 신설 쓰레기분리수거장 기반조성

Ⅱ		실정보고 검토내용

❍ 현장실정사항

현황 및 문제점	검 토 의 견	검토결과
▸신설 담장이 철근콘크리트 외면치장벽돌쌓기로 계획되어 있으나, 기존 담장이 치장벽돌쌓기로 되어 있어 공법 변경 필요	▸기존 담장과 동일한 공법으로 변경 필요 - 철근콘크리트 외면치장벽돌쌓기 : 20m → 0m - 1.5B 치장벽돌쌓기 : 0m → 20m	승인

Ⅲ		검토의견 및 처리계획

❍ 상기 검토의견을 시공사에 통보하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 시공사 공문(보고내용, 개략내역서 포함) 1부.  끝.