문서번호	시설과-7176
결재일자	2015.11.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
허용석		이춘한	11/20 공헌구
협 조

-서울랜드 고압전력케이블 교체 전기공사-

예비준공검사 계획

2015. 11

서울대공원

(시설과)

- 서울랜드 고압전력케이블 교체 전기공사 -

예비준공검사 계획

『서울랜드 고압전력케이블 교체 전기공사』와 관련하여 예비준공검사를  다음과 같이 실시하고자 합니다.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 서울랜드 고압전력케이블 교체 전기공사

□ 공사기간 : 2015.6.29. ~2015.12.25.

□ 계약금액 : *************

□ 계 약 자 : ************

□ 감    리 : *********************

□ 공 정 률 : 83%(9개 구간 11,353m 중 7개 구간 9,400m 완료)

Ⅱ		예비준공 검사

□ 검사자

- 공사감리

회 사 명	성 명	등 급	비 고
**********	***	비상주감리원 고급
	***	책임감리원 중급

- 시 설 과 : 이춘한, 황인공

- 서울랜드 : 전기안전관리자 최정주 과장

□ 검사일자 : 2015.11.23. 13:00 ~ 11.24. 18:00

□ 검사내용

- 고압케이블 포설상태(삼각배열, 연가) 및 고정상태

- 케이블 트레이 설치상태

- 고압케이블 단말처리 상태

- 기타 고압케이블 교체공사에 따른 전반적인 사항

Ⅲ		향후계획

□ 예비준공검사 시 지적사항에 대하여 공사반영 조치하여 공사시행에

만전을 기하고자 함.  끝.