투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	『산양 방사장정비 및 선물의집 구조체 보수보강공사』설계변경 시행

1. 시설과–7129(2015.11.19)호와 관련입니다

2. 우리 대공원에서 시행중인“산양 방사장정비 및 선물의집 구조체보수보강공사”와 관련하여 설계변경 시행코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 산양 방사장정비 및 선물의집 구조체보수보강공사

나. 공사금액 : 금97,500,000원

다. 공사기간 : 2015. 10. 08. ~ 2015. 12. 06

라. 계 약 자 : ㈜영원이앤씨 대표 경 정 식

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
도 급 비	86,173,900	97,500,000	증 11,326,100
공사기간	2015. 10. 08. ~ 2015. 12. 0 6	2015. 10. 08. ~ 2015. 12. 0 6	변동없음

바. 설계변경 사유 : 공사물량 증·감 및 제경비 정산 등

사. 공원이용 시민만족도 향상, 동물사관리기능 및 야생동물 종보존, 공원안전시설보수 및 정비, 시설비

붙임 : 1. 실정보고에 따른 설계변경 검토 보고서 1부. 끝.

주무관	이상국		시설과장	공헌구		관리부장	11/20 심상원
협조자	총무과장	이경로
시행	시설과-7187	(		)	접수		(		)
우			/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7410	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개