문서번호	토목부-24661
결재일자	2015.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상욱		권혁대	11/23 代서관석
협조
	주무관		강철규

공사 설계변경(1회) 검토보고

(서울역 주변 교차로 개선공사)

2015. 11.

도시기반시설본부

(토목부)

공사 설계변경(1회) 검토보고

(서울역 주변 교차로 개선공사)

『서울역 주변 교차로 개선공사』실정보고 승인 9건 외 실시공정산분을 반영하기 위한 설계변경 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 유호15-20호(2015.11.20.) 설계변경서(1회) 제출

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 서울역 주변 5개소 교차로

○ 규    모 : 교차로 개선 4개소, 삼거리 신설 1개소

- 서울역교차로, 중림동교차로, 염천교교차로, 숙대입구교차로, 숭례문삼거리(신설)

○ 공사기간 : 2015. 8. 7.∼ 2015.12.31.

○ 도 급 비 : 1,034백만원

○ 시 공 사 : 유호산업개발㈜

Ⅲ		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

○『관급자재 수급방법 변경 외 8건』의 실정보고 승인

- 관급자재(아스콘) 수급방법 변경(관급→사급)  →‘15.10.14.

- 광케이블 이설  →‘15.10.06.

- 공사용 휀스 설치 변경  →‘15.10.06.

- 맨홀인상 및 보행자휀스 설치변경  →‘15.10.19.

- 기존도로 재포장  →‘15.10.27.

- 공사방법 변경(주간→야간) →‘15.10.27.

- 보도정비  →‘15.11.03.

- 터파기 시공방법 변경 →‘15.11.18.

- 수목 이식 등 →‘15.11.20.

○ 기타 수량 증감 (보도블럭, 흄관, 측구 등)

□ 설계변경 내역                                      (단위 : 원)

공 종	공 사 비			비 고
	당 초	변 경	증 · 감
1. 관급자재 수급방법 변경(관급→사급)	-	138,974,000	138,974,000	토목부-21514 (2015.10.14.)
2. 광케이블 이설	-	8,272,000	8,272,000	토목부-20903 (2015.10.06.)
3. 공사용 휀스 설치 변경	1,078,000	15,752,000	14,674,000	토목부-20876 (2015.10.06.)
4. 맨홀인상 및 보행자휀스 설치변경	-	20,152,000	20,152,000	토목부-21802 (2015.10.19.)
5. 기존도로 재포장	-	44,352,000	44,352,000	토목부-22437 (2015.10.27.)
6. 공사방법 변경(주간→야간)	52,349,000	81,015,000	28,666,000	토목부-22515 (2015.10.27.)
7. 보도정비	2,123,000	46,926,000	44,803,000	토목부-23058 (2015.11.03.)
8. 터파기 시공방법 변경	4,807,000	20,273,000	15,466,000	토목부-24321 (2015.11.18.)
9. 수목 이식 등	21,516,000	41,360,000	19,844,000	토목부-24571 (2015.11.20.)
10. 기타수량 증감 외	-	15,586,000	15,586,000
합 계	81,873,000	432,662,000	350,789,000

□ 공사비 증·감 내역                                 (단위 : 원)

구 분	공 사 비		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
1. 염천교 교차로	189,482,674	243,290,894	53,808,220
2. 중림동 교차로	35,786,266	124,951,837	89,165,571
3. 숙대입구 교차로	43,218,743	53,255,260	10,036,517
4. 서울역 교차로	337,777,038	424,508,363	86,731,325
5. 숭례문 교차로	59,813,353	61,519,543	1,706,190
직 접 공 사 비	666,078,074	907,525,897	241,447,823
6. 제경비	143,565,452	184,852,959	41,287,507
7. 일반관리비	48,519,215	65,542,731	17,023,516
8. 이윤	83,098,104	101,248,413	18,150,309
공 급 가 액	940,270,909	1,259,170,000	318,899,091
9. 부 가 가 치 세	94,027,091	125,917,000	31,889,909
도 급 예 정 액	1,034,298,000	1,385,087,000	350,789,000
관 급 자 재 비	184,600,000	90,692,000	93,908,000
이 설 비	111,500,000	111,500,000	-
총 공 사 비	1,330,398,000	1,587,279,000	256,881,000

Ⅳ		조치계획

○ 『관급자재 수급방법 변경 외 8건』에 대한 실정보고 승인사항 및 기타 수량 증감을 반영한 설계변경은 적정한 것으로 판단되어 계약금액을 조정하고자함.

붙  임 : 설계변경내역서(1회) 1부.  끝.