급수공사 작업기한 연기 보고

(화양동 1**-*호)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
박상열	김태형	11/23 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-31251

광진구 상수도공사 감독업무 수행*********** 급수공사) 중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2015. 11. 23.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 박 상 열

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 광진구 상수도공사(장기계속공사)

연번	주 소	수요가명	공사기간	지시번호	비 고
1	*********	***	`15.10.24. ~ 11.20.	개량-44

□ 연기요청사항

연번	주 소	수요가명	연기요청 사유	공사연기 기간	요청인
1	*********	***	기존관 폐쇄지점 자재적치로 굴착지연	`15.12.04.	***

□ 검토결과

○ 신축현장 타공정 지연 및 교체장애 단수로 인한 수용가측 공사연기 요청 등으로 공사기간내 공사가 어려워 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주 소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간	비고
1	*********	***	`15.10.24. ~ 11.20.	`15.10.24. ~ 12.04.

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.