함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	준공기한 연기 보고에 대한 검토결과 회신(명일동 309-1 송배수관)

1. 공사감독2처-18948(2015.11.23)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독중인 『명일동 309-1~46-4번지 간 송배수관 정비공사』의 준공기한 연기 보고에 대하여 우리사업소 검토의견을 아래와 같이 회신하오니 공사감독 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

- 아       래 -

연번	공단 보고내용 및 검토의견	사업소 검토의견	비고
1	- 계약상대자로부터 준공기한 연기 요청을 받음. - 11월에 잦은 우천으로 인하여 공사기간이 절대부족하여 준공기한 연기가 불가피한 실정임. - 잔여 공정 등의 소요기간을 고려하여 준공기한을 당초 11.30에서 12.11까지 연기코자 함.	- 귀 공단 의견대로 시행하고, 변경사항에 대하여는 계약상대자로 하여금 변경계약 시행토록 조치 바랍니다.

끝.

	강동수도사업소장
주무관	김주경		시설관리과장	전결 11/23 남정열
협조자
시행	시설관리과-22525	(		)	접수		(		)
우	05397	강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/
전화	3146-5207	/전송	3146-5239	/	*********@seoul.go.kr	/	대시민공개