문서번호	시설보수과-4219
결재일자	2015.11.23.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	11/23 이종엽
협조

관급자재(아스콘) 구매 관련 검토보고 [면목천복개구조물 보수공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

성동도로사업소

(시설보수과)

관급자재(아스콘) 구매 관련 검토보고

[면목천복개구조물 보수공사]

□ 공사 현황

○ 공 사 명 : 면목천복개구조물 보수공사

○ 공사개요 : 교면방수 및 재포장 49a, 단면보수 829㎡, 균열보수 138m 등

○ 공사기간 : 2015.11.03. ~ 2015.12.31.

○ 도 급 비 : 828,396,100원

○ 도 급 자 : 지형건설

□ 관급자재(아스콘) 구매 추진경위

○ 2015.10.07. : 공사발주

○ 2015.10.08. : 관급자재 구매 요청 – 추정가격 57,750천원

(아스콘 WC-1, T=13mm, PG-64-22, 표층용, 1등급골재)

○ 2015.10.28. : 관급자재 1차 입찰(1개사 적격업체 - 심사 부적격)

○ 2015.11.19. : 관급자재 2차 입찰(무응찰)

○ 2015.11.19. : 구매업무 협의(조달청)

- 2회 입찰결과 유찰되어, 동 규격으로 더 이상 구매추진 곤란

□ 구매 관련 현황

○ 조달청에서 재입찰 시 동일한 조건 입찰로 계속 무응찰 예상

○ 구매하고자 하는 물량은 수의계약 조건(50백만원 이하) 상회

○ 동절기 공사불가 및 금년 내 공사준공

□ 처리 계획

○ 상기 본 공사 여건상 조달청에 제3자단가계약이 체결되어 있는 아스콘(WC-1, T=13mm, 표층용, 3등급골재)을 구매, 공사를 공기 내에 마무리 하고자 함

붙임  관련 자료 1부. 끝.