서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	강동구청장(선사유적과장)
(경유)
제목	「서울 암사동 유적 화장실 개선 공사 」설계 변경 승인

1. 선사유적과-5910(2015.11.17.)호와 관련입니다.

2. 서울 암사동 유적 화장실(장애인) 내부 개선공사에 대해 아래와 같이 설계 승인하니 연내 공사가 완료 될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울 암사동 유적 화장실(장애인) 내부 개선

나. 공 사 비 : 12,000천원(국비 8,400천원, 시비 3,600천원)

다. 공사내용

- 서울 암사동 유적내 화장실중 장애인 화장실 내부 개선

※ 주차장 쪽 화장실(1동) 내부 장애인 화장실 휠체어 통행 개선

라. 공사기간 : 2015.11월 ~ 12월

붙임 1. 배치도 1부.

2. 평면도 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 암사동 유적 집행잔액 사용승인 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	유현수		문화재보존팀장	이종혁		역사문화재과장	11/23 강희은
협조자
시행	역사문화재과-9392	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 1동 4층	/
전화	2133-2626	/전송	768-8873	/	fbgustn2@seoul.go.kr	/	대시민공개