투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	통신 감리원 투입시기 변경 지시(서울재사용플라자 건립 공사)

1. 우리 본부에서 시행하는 『서울 재사용플라자 건립공사』와 관련입니다.

2. 『서울 재사용플라자 건립 공사』 감리용역의 통신 감리원 투입시기를 아래와 같이 변경 지시하니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 전기감리원 투입시기 변경 지시 내용

분 야	감리원	등급	투입시기		비고
			당 초	변 경
통신 (상주)	미정	특급	2015.12.01	통신공사 실 착공에 맞추어 투입 (총 투입기간 포함 별도 협의)

○ 감리원 투입시기 변경 사유

- 토목 굴착 작업 등 선행공정이 현재 추진중으로 통신공사의 실 착공이 2월 이후 가능 할 것으로 판단되어 투입시기 조정.

※ 통신감리원 총 투입기간은 별도협의.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)펨코엔지니어링건축사사무소 대표이사 귀하,서울재사용플라자 건립공사 건설사업관리단장 귀하
주무관	곽용길		열빛총괄과장	이달영		설비부장	11/23 박기형
협조자
시행	설비부-14682	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	대시민공개