문서번호	녹색에너지과-23399
결재일자	2015.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	전력관리팀장	녹색에너지과장
박상현	조성태	11/23 권민
협 조

열병합발전 설치장소 선정 계획

2015. 11

기후환경본부

(녹색에너지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

열병합발전 설치장소 선정 계획

산업통상자원부에서 분산형전원 보급 확대를 위해 열병합발전을 상용화하는 국책과제를 개발하고 우리시 공공건물에 시범 설치코자 의뢰하여 설치장소를 선정하고자 함.

□ 추진근거

○ 200kW급 MGT설치 Site선정 협조요청(코원에너지 ‘15.11.9)

□ 추진경위

○ 발 주 처 : 한국에너지기술평가원(산업부산하기관)

○ 계 약 자 : STX중공업(참여기업 코원에너지서비스 등 8개 기업)

○ 개발목표 : MGT 상용화로 국내 분산형 열병합발전 시장 진출

○ 과제기간 : ‘11.7 ~‘16.6(개발 및 실증기간 포함)

- ‘11. 7 : 200kW 열병합 발전시설 개발 국책과제 시행

- ‘15.12 : MGT 개발 및 연구소 테스트 완료

- ‘16. 2 : MGT 실증(코원에너지)-서울시에 장소 선정 요청

□ MGT 200kw 특징

구 분	개발품(STX MGT)	외국산(CAPSTON)
효 율	종합효율 : 75% (전기:32%, 열:43%)	종합효율 : 85% (전기:33%, 열:52%)
가 격	미책정(약 3.0억)	4.8억
유지보수	부품 및 조달비용 저렴	부품 및 조달비용 높음
기 타	Field Test Data 없음	제품 운전에 대한 자료 충분

○ MGT200kw(마이크로터빈발전기)를 설치시 에너지 요금이 기존 시설대비 10~20% 절감예상

○ 본 실증사업 발전시스템 및 설치비 전액(10억 상당)개발사 부담

□ 추진절차

○ 조사기간 : ‘15.11.30~12.20(20일)

○ 조 사 자 : STX중공업, 코원에너지서비스

○ 조사방법 : 전기/열사용량, 설치공간, 기관호응도 조사

○ 조사대상

연번	대상지	주소	비고
1	서울장애인종합복지관	강동구 고덕동 3124	일정은 기관별 협의
2	수서청소년수련관	강남구 수서동749
3	시립아동병원	서초구 내곡동 6-7
4	서울시데이터센터	서초구 서초동 393-1
5	잠실수영장1,2	송파구 잠실동 10-1
6	서울대공원 사료조리실	과천시 막계동 159-1
7	송파노인전문병원	송파구 삼전동 172
8	시립양로원	강동구 고덕동 317-23
9	강남자원회수시설	강남구 일원동 4-1

○ 대상선정 : 1개소

- 코원에너지 공급권역내 기관 9개소 중 배열을 100% 사용할 수 있는 곳

- 현장조사 자료를 기초로 MGT설치 site 평가표에 따라 최종 대상지 선정

□ 향후계획

○ MOU 체결 : 서울시, 설치기관, STX중공업, 코원에너지서비스

○ 설치 및 모니터링 : ‘16.3~’16.6(3개월)

○ 모니터링 완료 후 설치기관과 지속운전 협의 예정

□ 행정사항

○ 조사대상지 9개소에 대한 현장조사 협조 공문 발송

첨부 : 1. 사업대상지 현장 조사표 1부.

2. 사업대상지 선정 배점기준 1부.  끝.