문서번호	설비부-14804
결재일자	2015.11.24.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
이상협		김창균	11/24 박기형
협조

『신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)』

실정보고 사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)』

실정보고 사항 검토 보고

감사원 감사결과 신림~봉천터널의 방재시설 설계 보완에 대한 조치방안을 마련코자 시행한 전문업체 설계용역비 실정보고에 대해 검토 보고 드림

□  공사 개요

공 사 명 : 신림~봉천터널 도로개설공사(1공구)

규    모 : 지하차도 1.1km, 터널 1.7km, 폭원 왕복4차로

공사기간 : ‘10. 10. 5  ~ ’17. 12. 31

시 공 사 : 두산건설(주)외 6개사

공 사 비 : 194,935백만원

감 리 사 : ㈜동일기술공사외 1개사

□  관련 근거

감사담당관-5602(‘15.4.10)  : 감사원 감사결과 처분요구 통보

설비부-8350(‘15.7.10)     : 감사원 감사결과 조치계획 보고

㈜동일기술공사 제15-3133(‘15.11.20) : 실정보고 검토의견 제출

□  실정보고 내용

실정보고

공 종	실정보고 내용	증 감
설계용역비 (종방향 풍속제어 해석)	‘14년 하반기 감사원 감사결과 지적된 제연설비 보완 조치사항에 대하여 신뢰성을 확보하고 검증하기 위해 전문업체에 설계용역 시행	증 30,000천원

설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
금 액	194,935,960,700	194,965,960,700	증 30,000,000

감리원 검토의견

‣ 용역비는 엔지니어링 사업대가의 기준(실비정액가산방식) 적용.

‣ 관련법규에 다라 설계용역비는 적합하게 산정되었으며, 추가 공사비는 계약금액 조정이 가능함.

□  보고자 의견

감사원 감사결과 방재시설 설계보완 지적사항에 대하여 신뢰성있고 합리적인 조치방안을 마련하기 위하여 전문업체에 설계용역을 시행한 것으로

실정보고에 대한 감리원 검토의견이 타당하여 승인하고자 하며 추후 설계변경시 반영 하고자 함.

따로붙임  1. 감리원 검토의견서 1부.

2. 감사원 감사결과 조치계획 보고서 1부.

3. 전문업체 용역결과 보고서(신한대학 류지오 교수) 1부.

4. 시공사 공문 1부.  끝.