문서번호	설비부-14807
결재일자	2015.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
성호준		김창균	11/24 박기형
협조

「한양도성 삼선지구 경관조명 개선공사」

관급자재 변경 구매 검토

2015. 11.

도시기반시설본부

(설비부)

「한양도성 삼선지구 경관조명 개선공사」

관급자재 변경 구매 검토 보고

「한양도성 삼선지구 경관조명 개선공사」 관급자재 변경에 대한 감리원의 실정보고 사항에 대해 검토 보고 드림

□ 공사개요

❍ 건    명 : 한양도성 삼선지구 경관조명 개선공사

❍ 계 약 자 : ㈜예광전력

❍ 공사기간 : `15. 10. 16. ~ `15. 12. 10.

❍ 공사금액 : 1,135백만원(도급 402백만원, 관급 733백만원)

❍ 감 리 사 : ㈜동원이씨에스

□ 관련근거

❍ 동원-11-23-1호(`15.11.23.) : 현장상황 실정 검토결과 보고

□ 실정보고 내용

❍ 조명 등기구 변경

(단위 : 천원)

품 명	규 격	당 초		변 경		증·감		사 유
		수량	금액	수량	금액	수량	금액
경관조명	LED20W	337	288,135	306	261,630	감)31	감)26,505	경관조명 설치효과 증 진
거주로조명설비	LED80W	28	28,000	51	51,000	증)23	증)23,000
계							감) 3,505

❍ 감리원 검토의견

경관조명 설치효과 증진하기 위하여 조명기구 설치 수량 조정함이 적절하다고 판단됨

□ 보고자 의견

❍ 감리원의 설계변경 보고가 타당하여 승인하고 계약부서에 변경계약의뢰코저 함

붙임 : 실정보고서 1부.  끝.