문서번호	설비부-14811
결재일자	2015.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
이상협		김창균	11/24 박기형
협조

『서울과학관 건립 기계설비공사』

설계변경 검토 보고(총차,1차 - 제1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울과학관 건립 기계설비공사』

설계변경 검토 보고(총차,1차 제1회)

「서울과학관 건립 기계설비공사」의 설계변경 사항에 대하여 검토 보고 드림

□  공사 개요

위    치 : 노원구 하계동 산 11번지 일대(불암산 도시자연공원 내)

규    모 : 지하1층 / 지상3층, 연면적 12,330.81㎡

공사기간 : 총차 ‘14.05.08 ~ ‘16.01.12 (1차 ‘15.11.30)

공 사 비 : 총차 3,080백만원 (1차 700백만원)

시 공 사 : 인하공영(주) 외 2개사

감 리 사 : ㈜정림종합건축사사무소 외 2개사

□  관련 근거

경제정책과-14206(‘15.10.08)호 : 주관부서 실 평면변경 요청

설비부-14416(‘15.11.17)호 : 실정보고 검토 보고

㈜정림건축종합건축사사무소 정림 2015-2512호(‘15.11.23) : 변경계약 요청

□  설계변경 내용

변경내용

구 분	변 경 내 용	비 고
실 평면변경	○ 1층 화장실 → 도서관으로 실 용도 변경 - 당초 : 위생도기 및 배관 - 변경 : 공조배관 및 덕트	경제정책과-14206 (‘15.10.08)

구 분	변 경 내 용	비 고
시설보완	○ 급탕대류펌프 2대 추가 ○ 배수펌프 2대 추가 ○ 소화가스설비 2개실 설치 ○ 냉각탑 2WAY밸브 2개소 설치 ○ 지하1층 위생,공조배관 동파 방지 열선 설치 ○ 옥외 우수저류조 방류펌프 2대 추가
제경비	○ 1차 공사분 수수료 등 정산 - 건설하도급발급수수료, 건설기계대여 보증서 수수료

설계변경 금액                                  (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	3,079,887,600	3,091,550,000	증 11,662,400
1 차	700,000,000	700,000,000	물량 조정

감리원 검토의견

‣ 실정보고 승인에 의한 내용과 1, 2차 공사간 시공 가능 공정을 조정한 것으로 검토 결과 적합 함.

□  보고자 의견

주관부서의 요청사항 및 시설 보완에 대한 반영과(총차) 공사 차수간 내역조정(1차)을 반영한 것으로 감리원 검토내용이 타당하므로 설계변경 하고자 함.

따로붙임  1. 감리원 검토의견서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차, 1차) 각 1부.  끝.