문서번호	토목부-24820
결재일자	2015.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
김종혁		이승우	11/24 代서관석
협조

설계자문회의[서면] 결과 보고

[올림픽대로~여의도간 진입램프 설치 실시설계]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
도로계획과-1620 (2015.10.02.)	도로계획과	실시설계 시행 요청	실시설계 추진

2015.11.

도시기반시설본부

토목부

설계자문회의(서면) 결과 보고

건설기술진흥법 제6조, 동법시행령 제19조 및 서울특별시 건설기술심의위원회

조례에 의거 우리 본부에서 시행중인 「올림픽대로~여의도간 진입램프 설치 실시설계용역」의 내실화를 위한 설계자문회의(서면) 결과 보고임

용역 개요

○ 용역명 : 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치 실시설계

○ 위  치 : 올림픽대로 서울교~여의동로 축

○ 규  모 : 진입램프 설치 L=764.4m, B=6.4m, 올림픽대로 이설 L=980m

○ 사업비 : 5,000백만원 (용역비 389백만원)

○ 용역기간 : 2012.4.12. ~ 2015.12.30.

설계용역 추진현황

○ 2012.04.12. : “여의교 확장 외 1개사업 기본 및 실시설계용역” 착수

○ 2012.11.23. ~ 2014.10.01. : 하천점용 협의 (6회)

○ 2014.08.06. : 서울시민디자인위원회

○ 2014.12.12. : 기본설계 자문회의

○ 2015.09.24. : 기본설계 기술심의(조건부 : 실시설계시 심의 받을 것)

○ 2015.10.02. : 실시설계 요청 (도로계획과→토목부)

설계자문회의(서면) 시행

○ 일  시 : 2015. 11. 16.(월)~ 11.20.(금) 까지

○ 안  건 : 연결램프 평면 및 종단선형 변경, 교량 형고 변경 등

○ 위 원 명

구 분	분 야	소 속	직 책	성 명	비고
외부위원	도로	동일기술공사	사 장	한 상 주
	구조	연세대학교	교 수	김 상 효
	교통	아주대학교	교 수	최 기 주
내부위원	유지관리	안전총괄본부 교량안전과	과 장	이 용 심

주요 자문내용

○ 한상주 위원 [도로]

- 당초 교량 경간장을 82m→66m로 축소하는 것은 적정함

- 교량구간이 2중 곡선인 바 안전시설에 대한 세심한 설계가 필요함

○ 김상효 위원 [구조]

- 콘크리트 교량에 비해 진동이 큰 강교 구간에는 LMC포장보다는 아스팔트 포장이 유리함

- 강박스 구간은 점검자가 통행하기 편리하도록 통행로 확보 요망

○ 최기주 위원 [교통]

- 최대 경간장 축소에 따라 고가 진입 속도가 줄어듦으로 안전을 위해 설계속도 이하로 통행토록 감속 유도 필요함

○ 이용심 위원 [유지관리]

- 평면선형 변경으로 교량 경간장이 줄어드는 사항은 시공성과 구조적 안전성 측면에서 적정함

- 램프교량 교면포장 재료에 대한 심도있는 검토가 필요함

- 교면 침투수와 배수 불량으로 신축이음부에 체수에 의한 하자 발생 없도록 계획

향후 추진계획

○ 설계 자문내용을 반영하여 설계를 추진하되 실시설계 건설기술심의시 반영

○ ’15.12.    : 실시설계 건설기술심의

○ ’15.12.30 : 설계용역 완료

붙임 : 1) 위원별 자문의견서 각 1부.

2) 자문의견 조치계획서 1부.  끝.