문서번호	도시철도설비부-11944
결재일자	2015.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		송변전과장		도시철도설비부장
고명규		박동규		11/24 정찬웅
협 조
	정보통신과장				추경수
	신호과장				김영하

『9호선 3단계 시스템분야 책임감리용역』

감리원 투입계획(총차 1회) 변경 보고

2015. 11. 24.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	☑
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	☑
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	☑
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	☑
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	☑
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	☑
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	☑
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	☑
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	☑	□

『9호선 3단계 시스템분야 책임감리용역』

감리원 투입계획(총차 1회) 변경 보고

『9호선 3단계 시스템분야 책임감리용역』에 대한 분야별 감리원 투입계획을 합리적으로 변경하여 감리업무수행에 만전을 기하고자 함.

용역개요

○ 용 역 명 : 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 전면책임감리용역

○ 과업위치 : 송파구 잠실운동장 ~ 올림픽공원 ~ 강동구 둔촌동(보훈병원 앞)

○ 과업범위 : 9호선 연장건설(3단계) 사업구간 시스템분야 책임감리

- 연  장 9.14km, 정거장 8개소(변전실 3개소)

○ 계약현황 : 세종기술(주) 외 2개사 공동수급(분담이행방식)

구 분	용 역 기 간	계 약 금 액	비 고
총 차	2015. 1. 5 ~ 2016. 12. 31	2,901,630천원
1 차	2015. 1. 5 ~ 2015. 12. 31	200,000천원

계약변경 내용(도시철도설비부-10428호, `15.10.13)

○ 변경사유 : 9호선 3단계 사업기간 22개월 연장 예정(`16.12월 ⇒ `18.10월)

○ 변경내용

- 총차 계약금액 변경 없이 용역기간만 변경

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
총 차	기 간	2015. 1. 5 ~ 2016.12.31	2015. 1. 5 ~ 2018.12.15	연장 23.5개월
	금 액	2,901,630천원	변동사항 없음
1 차	기 간	2015. 1. 5 ~ 2015.12.31	변동사항 없음
	금 액	200,000천원	변동사항 없음

- 감리원 실 투입시기 조정

∙ 조정전 : `15.1.5 ~ `16.12.31(24개월)

∙ 조정후 : `15.9.1 ~ `18.12.15(39.5개월 ⇒ 연장 15.5개월)

투입계획 변경사유 및 내용

○ 계약자가 총차 감리용역 계약변경 시행에 따른 합의각서 제출시 분야별

감리원 투입계획 변경･조정 요구[세종기술(주) S14D-2015-10호]

○ 분야별 투입인원 조정현황

구 분			등 급	재 조 정 전		재 조 정 후		증․감
				투입기간	투입인원	투입기간	투입인원	투입기간	투입인원
전 기	책임감리원		특 급	24.0개월	31.824인	39.5개월	49.248인	+15.5개월	+17.424인
	안전감리원		고 급	24.0개월	24.000인	0개월	0인	-24.0개월	-24.000인
	보 조 감리원	송변전	고 급	24.0개월	24.000인	31.0개월	28.187인	+7.0개월	+4.187인
			중 급	24.0개월	20.952인	10.0개월	7.854인	-14.0개월	-13.098인
		전차선	고 급	24.0개월	24.000인	30.0개월	28.098인	+6.0개월	+4.098인
			초 급	24.0개월	18.840인	11.0개월	3.211인	-13.0개월	-15.629인
		소 계		-	87.792인	-	67.350인	-	-20.442인
	비상주감리원		고 급	24.0개월	17.544인	39.5개월	13.017인	+15.5개월	-4.527인
	계			-	161.160인	-	129.615인	-	-31.545인
정 보 통 신	보 조 감리원		고 급	24.0개월	24.000인	39.5개월	37.125인	+15.5개월	+13.125인
			고 급	24.0개월	24.000인	32.5개월	30.562인	+8.5개월	+6.562인
			중 급	20.0개월	17.106인	23.0개월	18.692인	+3.0개월	+1.586인
			소 계	-	65.106인	-	86.379인	-	+21.273인
	비상주감리원		고 급	24.0개월	13.009인	39.5개월	9.006인	+15.5개월	-4.003인
	계			-	78.115인	-	95.385인	-	+17.270인
신 호	보 조 감리원		고 급	24.0개월	24.000인	37.5개월	35.254인	+13.5개월	+11.254인
			고 급	22.0개월	22.000인	15.0개월	14.095인	-7.0개월	-7.905인
			중급	12.0개월	10.443인	30.5개월	25.030인	+18.5개월	+14.587인
			소 계	-	56.443인	-	74.379인	-	+17.936
	비상주감리원		고 급	24.0개월	11.282인	37.5개월	7.621인	+13.5개월	-3.661인
	계			-	67.725인	-	82.000인	-	+14.275인
합 계				-	307.000인	-	307.00인	-	0인

- 안전감리원 미투입 ⇒ 분야별 보조감리원이 안전관리업무 대행(계약자 요구)

【전력시설물 공사감리업무 수행지침(지식경제부고시 제2012-210호) 제48조 제②항】

∙ 분야별 보조감리원을 안전담당자로 지정하여 공사업자의 안전관리자를 지도․감독 할 수 있음.

○ 현지 차량 및 사무보조원 투입기간 조정(`15.10.16 투입)

- 현 지 차 량 : 48대(변동없음)

- 사무보조원 : 증 5.1인(48인 ⇒ 53.1인)

조치계획

○ 계약자의 요구를 반영하여 감리원 투입계획(총차)을 변경･조정하되,

`16. 1월 이후 투입예정인 보조감리원 6명(송변전 1명, 전차선 1명,

정보통신 2명, 신호 2명)에 대하여는,

○ 토목 및 궤도 등 선행공정 추진실적과 시스템분야별 시설공사 공정현황 등

전반적인 현장여건을 검토하여 투입시기와 기간을 효율적으로 조정시행.

행정사항

○ 9호선 3단계 사업기간 연장에 따른 총차 감리용역에 대한 계약변경은

계약금액 변경없이 용역기간만 변경하여 시행코자하며,

○ 금회 변경･조정된 감리원 투입계획에 의거 2차 감리용역에 대한 계약을

체결하여 시스템분야 감리업무수행에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 시스템분야 감리원 투입계획(총차 1회) 변경･조정 현황 1부.  끝.