함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제목	교통소통대책 점용기간 변경 요청(마포구청역~성산2교간 송배수관정비공사)

1. 교통운영과-19707(2015.10.13.)호의 2015년도 제15차 최종 자문결과와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행 중인『마포구청역~성산2교간 송배수관정비공사 』에 대하여 당초 수립된 교통소통대책 점용기간을 부득이하게 아래와 같이 변경요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

아   래 -

가. 공 사 명 : 마포구청역~성산2교간 송배수관정비공사

나. 점용기간  : 당초 - 2015.9.21.~ 2015.12.14.

변경 - 2015.9.21.~ 2016.08.31.

다. 변경요청 사유 : 사고이월 예정(동절기 도로굴착통제기간으로 공사중단)

라. 대상도로 : 성산로

마. 시공업체 : 호용종합건설(주)   대표 김익관

바. 감독기관 : 서울특별시 시설관리공단

붙 임 : 1. 위치도 1부

2. 자문결과 공문 1부(교통운영과-19707,‘15.10.13).  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김용섭		주무관	함현준		급수운영과장	11/24 장종욱
협조자
시행	급수운영과-26259	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/
전화	3146-3667	/전송	3146-3689	/		/	부분공개