문서번호	시설과-6025
결재일자	2015.11.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장
최지효	11/24 진병규
협 조
	주무관		이전호
	주무관		代최지효

『보라매공원 내 남부장애인복지관 담장개선공사』준공기한 연기 검토보고

2015. 11.

동부공원녹지사업소

(시   설   과)

『보라매공원 내 남부장애인복지관 담장개선공사』준공기한 연기 검토보고

우리 사업소에서 추진 중인 『보라매공원 내 남부장애인복지관 담장개선공사』와 관련하여 준공기한 연기 사유가 발생하여 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 보라매공원 내 남부장애인복지관 담장개선공사

❍ 공사기간 : 2015. 11.9. ～ 11.28(20일간)

❍ 총공사비 : 18,676,500원

❍ 도 급 자 : 포코건설㈜ 대표 장윤순

❍ 공사내용

- 남부장애인복지관 담장 부분 철거 및 신설(후퇴 설치) 20m

- 기존 쓰레기분리수거장 철거 및 신설 쓰레기분리수거장 기반조성

Ⅱ		검 토 내 용

❍ 준공기한 연기사유

- 발주처 요구사항에 따른 추가공종 발생으로 자재구입 및 장비 확보 등에 소요되는 추가 시일 필요 (아스팔트 포장 구간 추가)

- 총 공사기간 20일 중 현재까지(15일) 연일 또는 격일로 9일동안 비가 내려 공사를 지속하기 어려워 절대공기 부족 (※기상청 날씨현황 참조)

❍ 준공기한 변경

- 당초 : 2015. 11. 9 ~ 11. 28 (20일간)

- 변경 : 2015. 11. 9 ~ 12. 10 (32일간)

❍ 지체상금 부과 검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 계약부서에 준공기한 연기를 요청하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 2015년 11월 날씨현황 1부.  끝.