함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 계약 의뢰(2015년 정수장 자동제어설비 DCS 유지관리용역)

우리센터에서 시행중인 『2015년 정수장 자동제어설비 DCS 유지관리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 정수장 자동제어설비 DCS 유지관리용역

나. 공사개요 : 2.3계열 여과지 철거에 따른 유지보수 대상물량 감소

다. 도 급 자 : 비츠로시스(주) 대표 장우석

라. 계약기간 : 2015.04.01~ 2016.03.31.

마. 변경내용 : 계약물량 변경(계약금액 변경)

구 분	당초금액(천원)	변경금액(천원)	증․감(천원)
도 급 비	6,940	5,890	-1,050

바. 설계변경 및 공종별 금액변경 사유

- 계약물량 증,감 사항 발생

사. 예산과목

-상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체,기타교체비

붙임  1) 설계변경심의회 개최 1부

2) 설계변경 심의결과 및 심의서 1부

3) 설계변경 내역서 각 1부

4) 합의서 1부.  끝.

주무관	최병일		정수시설과장	11/24 윤종민
협조자	주무관	김인준
시행	정수시설과-4162	(		)	접수		(		)
우	04770	성동구 왕십리로 27	/
전화		/전송		/		/	대시민공개