문서번호	시설관리과-32480
결재일자	2015.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
최성태		최재영	11/24 오기석
협조

급수공사 연기보고서(신설-81)

2015. 11

시설관리과

명에 의거 동대문구 관내 지역담당 업무 수행 중 공사기간 연기 사유가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 현 황

가. 공 사 명 : 2015년 제기동외 6개동 상수도공사

나. 도 급 자 : 수호건설  대표 문병순

□ 보고내용

○ 급수공사 작업지시 사항 중 아래와 같은 사항으로 부득이 공사기한 연기가 필요한 실정임.

공 사 종 류	공사위치	공사개요	연기 사유	공사기간
				당 초	변 경
신설-81	용두동 102-110	D=25mm L=6m	수요가에서 현장공사 지연으로 급수공사 연기요청	2015.11.12 ~2015.11.24	2015.11.12 ~2015.12.04

□ 처리의견

○ 원활하고 안전한 급수공사 시행을 위해 공사기한을 연기하여 공사장 안전 관리 및 민원       처리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.