문서번호	방재시설부-15673
결재일자	2015.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
이병환		김흥근	11/24 임춘근
협조
	주무관		박찬표

「잠원2빗물펌프장신설공사 총차, 1차 및 2차분」

협의율 조정 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

- 잠원2빗물펌프장신설공사 총차, 1차 및 2차분 -

협의율 조정 검토 보고

총차 3회, 1차(3회) 및 2차(2회)분 설계변경 전 사업변경안 추진과  관련 발주처 요구에 의해 추가된 신규비목에 대해 계약상대자간 협의율 조정 결과를 보고드림.

□ 사업개요

○ 위  치 : 압구정로 11길~신사공원~한강

○ 규  모

- 당초 : 펌프장 Q=1,400㎥/분, 유․출입관로 L=640m, 수문 2개소 등

- 변경 : 자연방류관로 L=640m, 가동보 1개소, 수문 2개소 등

당초안(유역분리후 잠원2빗물펌프장 신설)	변경안(자연방류관로 설치, 펌프장 제외)

○ 공사기간 : `13.01.03 ~ `15.12.31(`16.12.31 연기 예정)

○ 도 급 비 :  139억원

○ 시공사/감리사 : 에스트건설(주)/신명건설기술공사

□ 추진경위

○ '13. 01~12 : 공사착공 및 행정행위 이행(시설결정, 점용허가 등)

○ '13. 10. ~ `14. 10 : 펌프장건설 반대민원 제기(1,800여세대)

※ 민원 제기기관 : 대통령 비서실, 국민권익위, 서울시(`14.2월 공사중단)

○ '14. 3~`15. 9 : 민원해결 국회의원 정책간담회, 시장님 면담,                                전문가 대안검토 자문회의, 사업변경안 수립 등

※ 사업변경안에 대한  민원수렴을 위한 주민설명회 개최(2회)

○ '15. 10 : 공사재개(관로 부설 및 신사공원 복구중, 공정 15%)

□ 보고내용

○ 총차 3회, 1차(3회) 및 2차(2회)분 설계변경 전 사업변경안 추진과 관련, 발주처 요구에 의해 추가된 신규비목에 대해 협의율을 결정하고자 함.

○ 협의율 조정 회의 결과

- 일    시 : 2015. 11. 18(수) 10:00

- 참 석 자 : 공사관리관, 현장대리인, 책임감리원

- 회의내용

․발주처입장  : 낙찰율(80.71%)로 정함.

․시공사입장 : 발주처 요구에 의해 추가된 신규비목에 대한 단가는                    공사계약일반조건에 의거 변경시점의 설계가로 단가                  기준을 정하기를 원하며, 수용이 어려울 경우 강제                   협의율 조정을 원함.

□ 조치계획

○ 계약상대자측에게 낙찰율 적용을 지속 권고하였지만 원만한 해결이 안되어, 강제협의율 조정으로 결정코자함.

○ 강제협의율 : (80.712%+100%)/2=90.356%

붙임 : 회의록 1부.  끝.