문서번호	토목부-732
결재일자	2014.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
조현형		명경출	01/14 노우성
협조	계약1팀장		김점선
	주무관		이석우

겸재교건설 폐기물처리용역 계약변경 검토보고

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

2014. 01

도시기반시설본부

(토목부)

겸재교건설 폐기물처리용역 변경계약 검토보고

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

겸재교 건설공사 추진시 보고된 실정보고중 폐기물처리용역과 관련된 검토보고 8건에 의해 총폐기물처리물량이 증가됨에 따라 용역계약금액 증액 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 공사용 진입로 포장검토 보고[토목부-6922호(2009.05.18)]

○ 수목이식 및 시설물이설 실정보고[토목부-14163호(2009.10.12)]

○ 가설동바리 변경에 따른 실정보고[토목부-1134호(2010.01.27)]

○ 신상도 지하차도 보상건물 처리계획[토목부-3663호(2010.03.19)]

○ 동대문구 제설창고 철거 및 재설치 실정보고[토목부-2770호(2010.11.18)]

○ 도로확장구간 가로수 제거 및 식재 검토보고[토목부-9638호(2012.05.21)]

○ 수목이식에 따른 실정보고사항 검토보고[공공시설부-4643호(2013.06.10)]

○ 민원에 의한 사업계획변경 재설계 완료보고[토목부-16069호(2013.08.27)]

Ⅱ		공사개요

○ 용 역 명 : 겸재교 건설 및 연결도로확장공사 폐기물처리용역

○ 용역개요

- 폐콘크리트 : 20,488.0톤.	- 폐아스콘 : 1,604.0톤.

- 혼합건설폐기물 : 2,327.0톤.	- 임목폐기물 : 6.0톤.

○ 용역기간 : 2009.05.11 ~ 2015.12.31

○ 용 역 비 : 402,347,000원

○ 용 역 사 : ㈜방태             ○ 감 리 사 : ㈜동일기술공사외 1개사

○ 폐기물처리용역 발주현황

구 분	도 급 액	공 사 기 간	비 고
총 괄	402,347,000	2009.05.11 ~ 2015.12.31
1 차	72,880,000	2009.05.15 ~ 2010.10.23	준 공
2 차	100,000,000	2010.10.24 ~ 2012.01.31	준 공
3 차	150,000,000	2012.02.01 ~ 2014.02.28	진행중
장 래	79,467,000	-

Ⅲ		감리단 보고내용

○ 기 실정보고 및 금번 설계변경에 의한 총처리물량

(단위 : 톤)

구 분	철근 콘크리트	무근 콘크리트	폐아스콘	혼합 폐기물	임목 폐기물	비 고
<기 실정보고건>
진입로 포장 (동부간선도로)	-	48.3	107.9	-	-
수목이식 및 시설물이설(‘09)	-	87.0	-	-	-
가설동바리	-	598.0	-	-	-
제설창고 철거 및 재설치	52.8	-	-	-	-
제방부 수목이식(‘13)	-	213.4	-	-	14.4
신상도지하차도현장 보상건물철거 위탁처리	2,931.6			186.0
<금번 설계변경건>
재설계에 의한 설계변경	16,051.0	-	-	2,313.0	-	건물철거
	8.0	2,359.1	1,443.7	-	-	동대문구 도로확장구간
	14.2	1,663.4	691.0	-	-	중랑구 도로확장구간
매립폐기물 발생	-	59.8	-	-	-	중랑구 제방공원길
	-	16.2	-	-	-	동대문구 도로확장구간
중랑구 가로수제거 물량 추가(‘12)	-	-	-	-	33.4	설계누락
합 계	19,057.6	5,045.2	2,242.6	2,499.0	47.8

○ 폐기물처리물량 증감현황

(단위 : 톤)

구 분	철근콘크리트	무근콘크리트	폐아스콘	혼합폐기물	임목폐기물	비 고
당 초	18,393	2,095	1,604	2,327	6
변 경	19,057	5,045	2,242	2,499	47
증(감)	증 664	증 2,950	증 638	증 172	증 41

Ⅳ		감리 검토의견

○ 상기와 같이 민원에 의한 설계변경 및 실정보고 승인에 따른 폐기물처리 물량 조정건 등에 대한 검토결과, 설계변경에 의한 계약금액을 조정하여 반영함이 타당하다고 사료됨.

Ⅴ		조 치 계 획

○ 상기 감리 검토의견과 같이 기실정보고건과 재설계에 따른 추가물량 및 매립폐기물 발생 등 폐기물처리용역 총괄계약내역을 설계변경(증액)하여 아래와 같이 총부기금액을 변경계약하고 추후 4차 용역을 발주하고자 함.

○ 폐기물처리용역 계약금액 조정내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도 급 액	402,347,000	473,319,000	증 70,972,000
공 급 가 액	365,770,000	430,290,000	증 64,520,000
부 가 세	36,577,000	43,029,000	증 6,452,000

붙임 : 1. 감리 검토의견서 1부.

2. 총괄 설계변경내역서 1부.   끝.