투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	『2014년 특별교통안전진단 개선대상 지점 교통신호기 공사』 설계변경(1차-공기연장) 시행(양화교 주변)

『2014년 특별교통안전진단 개선대상 지점 교통신호기 공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차-공기연장)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2014년 특별교통안전진단 개선대상 지점 교통신호기 공사

2. 공사기간

- 당초 : 2015.10.22. ~ 2015.11.30.

- 변경 : 2015.10.22. ~ 2015.12.18.

3. 공사위치 : 강서구 염창동 284-85(양화교 주변)

4. 도 급 자 : 상형플러스전력 주식회사 대표자 이형규

5. 설계변경내역 (변경없음)

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
총공사비	64,250,930	64,250,930	-	변경 없음
도 급 비	64,250,930	64,250,930	-

6. 설계변경 사유 : 본 공사는 특별도로교통안전진단에 따른 교통신호기 개선                                 공사로 가로등관련 유관기관(서울시 시설관리공단)과 협의지연에                                 따른 절대공기 부족함으로 공기연장하여 신속히 공사를                                 진행하고자 합니다.

7. 예산과목 : 교통운영과, 도로교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리                             강화, 교통사고 잦은곳 개선, 시설비

붙임문서 : 1. 방침서 1부.

2. 감리 기술검토의견서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

★주무관	홍승찬		기전과장	박재경		강서도로사업소장	11/25 조병준
협조자	주무관	박태진		주무관	이재민		관리단속과장	이은엽
시행	기전과-14935	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7989	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개