함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고에 대한 사업소 의견 통보

1. 공사감독2처-18830(15.11.20)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 공단에서 감독중인 『종로구청~탑골공원간 송배수관부설공사』 의 실정 보고에 대하여 우리사업소 검토의견을 아래와 같이 통보하오니 공사감독 업무 및 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

공단 보고 및 검토내용	사업소 검토의견	비고
□ 당초와 현장여건이 상이하여 밸브 및 변실 설치(D100~500mm, N=10개소)가 변경 되는 실정으로 변경 물량은 설계변경시 반영코자 함.	□ 당초와 현장여건이 상이하여 밸브 및 변실 설치(D100~500mm,N=10개소)가 물량 변경되는 실정으로 물량 변경분에 대하여 설계변경시 반영할 것.
□ 2구간(이화사거리, D=600mm, L=36m)을 시행함에 있어 시험굴착 및 기존관 확인한 결과, 지하매설물 (통신관, 통신박스, 하수관-600mm,800mm) 하부에 기존관(600mm) 이 매설되어 있으며, 각 기존관 부설 상태(400mm, 600mm, 800mm) 가 복잡하여 관 교체 시공(기존관600mm 철거 후 관부설) 이 어려워 이화 사거리의 일부구간 공사제외가 발생되는 실정(관부설 L=29m 및 구형변실 1개소 D600mm 감소)으로 변경 물량은 설계변경시 반영코자 함.	□ 2구간 일부구간 공사제외가 발생되는 실정으로(관부설L=29m 및 구형변실 1개소 D600mm 감소) 변경되는 물량에 대하여 설계변경시 반영 할 것.

가. 공단보고 및 검토의견

끝.

	중부수도사업소장
주무관	이생기		시설관리팀장	채재일		시설관리과장	11/25 代채재일
협조자
시행	시설관리과-35262	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2199	/전송	02)3146-2239	/		/	대시민공개