문서번호	교통운영과-22904
결재일자	2015.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		신호시설팀장		교통운영과장
박지웅		김균호		전결 11/25 代심혁보
협 조

『신내노인종합복지관 주변 다목적 CCTV 이설공사』

준공기한 재연기 보고

2015. 11

도시교통본부

교통운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

「신내노인종합복지관 주변 다목적 CCTV 이설공사」

준공기한 재연기 보고

신내노인종합복지관 주변 다목적 CCTV 이설공사의 병행공사인 교통신호기공사의 교통소통대책 승인 등 공사관련 행정절차가 지연됨에 따라 원활하고 안정적인 공사진행을 위하여 준공기한을 연기하고자 합니다.

Ⅰ		공사개요

공사개요

【단위 : 원】

공사명	계약번호	계약기간	계약금액	계약업체	비고
신내노인종합복지관 주변 다목적 CCTV 이설공사	20151028743 -01	′15.10.19. ~ ′15.11.30.	2,240,000	㈜경림이앤지 대표 김계영

Ⅲ		준공기한 연기

준공기한 연기 내용

공사명	준공기한			비고
	변경전	변경후	증감일
신내노인종합복지관 주변 다목적 CCTV 이설공사	2015.11.30.	2015.12.11.	증)11

준공기한 연기 사유

준공기한 연기 사유 : 당해 공사의 병행공사인 성동도로사업소의 교통신호기 설치공사의 교통소통대책 승인 등 행정절차가 지연됨에 따라 원활하고 안정적인 공사를 진행하기 위하여 준공기한을 연기하고자 함.

준공기한 연기 세부내용

교통소통대책 중랑구청 교통행정과 제출(교통운영과-22705, 2015.11.23.)

▶ 서울특별시 중랑구 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 제4조

성동도로사업소 교통신호기 설치공사 병행공사 내역

▶ 다목적 CCTV 전원선 인입(굴착, 배관포설, 도로복구) - 전기업체 시공 분야

향후계획

재무과로 변경계약 의뢰

공사일정 조정 및 제반절차 준수.

붙임  합의각서 및 관련공문 각1부.  끝.