투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경 의뢰(2015년 도로굴착복구 시행도로 정비공사 폐아스콘 운반 및 처리용역 -북부)

우리사업소에서 시행중인 『2015년 도로굴착복구 시행도로 정비공사 폐아스콘 운반 및 처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015년 도로굴착복구 시행도로정비공사 폐아스콘 운반                               및 처리용역 -북부

나. 공사기간 : 2015. 06. 12 ~ 2015. 11. 30

다. 도 급 자 : ㈜태형기업 대표 김 재 수

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 용 역 비		72,640,650	77,570,000	증) 4,929,350
용역비	공급가액	66,036,954	70,518,182	증) 4,481,228
	부가가치세	6,603,695	7,051,818	증) 448,122
	계	72,640,650	77,570,000	증) 4,929,350

마. 설계변경사유 : 물량 증,감에 따른 설계변경

바. 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사,

시설비및부대비, 시설비

첨부 : 설계변경 관련도서 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	최완		도로보수과장	11/25 이석재
협조자
시행	도로보수과-11554	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동)	/
전화	02-944-5436	/전송	02-945-5072	/	*********@seoul.go.kr	/	대시민공개