투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	북한산성 4단계 1차 보수정비공사 변경계약 의뢰

우리 시에서 시행하고 있는 『북한산성 4단계 1차 보수정비공사』에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 북한산성 4단계 1차 보수정비공사

나. 계 약 자 : 원택건설(주) 대표 오원진

다. 계약금액 : 1,059,110,000원

라. 계약기간 : 2014.12.12.~2015.12.6.

마. 변경내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	’14.12.12~’15.12.6	’14.12.12~’15.12.17	증 11일

마. 변경사유 : 공사시행을 위한 사전절차인 개발제한구역 내 행위허가 처리지연

따로붙임  1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 준공(납품) 기한 연기의뢰서 1부.

3. 공정표 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
전문관	남궁환		문화시설과장	안연수		건축부장	11/25 안재혁
협조자	계약1팀장	김점선
시행	건축부-13359	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2629	/전송	02-3708-2659	/	nkh@seoul.go.kr	/	부분공개(5)