문서번호	건축부-13358
결재일자	2015.11.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
김현지		안연수	11/25 안재혁
협조

서울 한양도성 흥인지문․광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사

실정보고 검토 보고

(석재 가공면적 및 물량조정 외 4)

2015. 11.

도시기반시설본부

건    축    부

서울 한양도성 흥인지문․광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사

실정보고 검토 보고

‘서울 한양도성 흥인지문․광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사’ 관련 문화재 감리가 제출한 실정보고(석재 가공면적 및 물량조정 외 4건)에 대한 검토보고

1		공사개요

○ 공 사 명 : 서울 한양도성 흥인지문․광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사

○ 위    치 : 종로구 종로 288 흥인지문 일원 외1(사적 제10호)

○ 공사내용
- 성곽 복원 : 흥인지문 북측 멸실된 21m 성곽, 지대석 및 여장공사
- 단절된 성곽 연계성 회복 : 흥인지문 양측, 광희문 북측 총 105.7m 바닥포장 등

○ 감 리 단 : ㈜한인전통건축감리단

○ 시 공 사 : ㈜창의건설

○ 공 사 비 : 1,467백만원

○ 공사기간 : 2014.12.30~2015.12.17

2		관련근거

○ `15.7.10.  한양도성 단절구간 연계성 회복 용역완료 보고(한양도성도감)

○ `15.7.31.  업무지시(최종도면 확정에 따른 공사내용 및 물량증감 검토)

○ `15.11.25  실정보고 승인요청(한인감리 20*******01, 20*******03)

3		실정보고 검토

(직접공사비 증 425,250천원)

○ 주요내용 및 사유

연번	주 요 내 용	사 유	증․감 (천원)	비 고
소계			증 425,250

1	성곽 복원공사 석재 가공면적 및 물량 조정	· 문화재 기술지도 자문회의 및 한양도성자문 소위원회 의견반영(발주처 지시) · 수량산출서 정정 검토	증 412,958	건축부-6607 (’15.6.10)
2	바닥 흔적표시 확정 반영 및 물량 조정	· 한양도성자문 소위원회 의견반영 (발주처 지시) · 최종 설계도서 검토 지시에 따른 검토보고(발주처 지시)	감 126,617	건축부-8212 (`15.7.17) 건축부-8783 (’15.7.31)
		· 현장여건 반영검토	증 91,028
3	통합형 가로등 설치 및 투광 이설	· 최종 설계도서 검토 지시에 따른 검토보고(발주처 지시)	증 29,557	건축부-8783 (’15.7.31)
4	수리보고서 작성	· 기술지도 자문회의(3차) 의견 반영(발주처 지시)	증 16,500	자문회의(4차) (`15.6.4)
5	백악구간 여장보수	· 한양도성 백악구간 긴급보수 지시(발주처 지시)	증 1,824	건축부-5181 (`15.5.6)

○ 세부내역

연번	구 분		세부내역	증․감 (천원)	비 고
소계				증 425,250
1	성곽 복원공사	체성 및 여장 복원	- 동측성벽(C면), 남측성벽(B면) 성곽 해체, 쌓기, 지대석 가공면적 및 물량증가 (성벽 해체결과 잔존 성곽유구 반영) 성곽돌 가공물량 오류 정정	증 151,997	자문회의(4차) (`15.6.4)
			- 여장물량 누락(당초2개소→변경7개소) - 여장면석 마감방법 변경(거친정→고은정)	증 166,733	자문회의(7차) (`15.9.22)
		단절부 마감면	- 단절부 마감면 재료변경 및 가공 반영 (자연석→화강석, 기계다듬 반영)	증 30,203	한양도성자문 위원회 의견반영
			- 화계설치 신설	증 46,234
		가설공사	- 가설울타리, 강관비계, 안전발판, 규준틀 등 물량 누락	증 17,791
2	바닥흔적 연계성 회복공사	석공사	- 포장 석재종류 변경(거창석→고흥석,포천석) - 석재 가공면적 및 글자새김 추가	증 71,697	건축부-8783 (’15.7.31)
		박석깔기 공법변경	- (당초) 잡석+블록+UM수지몰탈+거친돌 → (변경) 잡석+혼합골재+마름돌	감 195,909
		포장공사	- 북부도로사업소 및 감독 현장 지시 사항 (도로박석 주변 아스팔트 재포장 추가)	증 12,931
		야간공사	- 도로 박석깔기(주요공정) 품할증 적용	증 47,773
		가설공사	- 가설울타리, 줄파기 물량누락 - 도로복개 가시설 설치 및 운영 반영 교통통제 및 안전처리(야간) 누락	증 43,255
		횡단보도	횡단보도 삭제로 화단공사 제외	감 15,336	건축부-8212 (`15.7.17)
3	가로등 이설공사		- 당초) 가로등 및 교통안내판 이설 → 변경) 통합형 가로등 신설	증 29,557	건축부-8783 (’15.7.31)
4	수리보고서 작성		- 전문가 조사 및 작성 지시	증 16,500	자문회의(4차) (`15.6.4)
5	백악구간 여장 긴급보수		- 백악구간 긴급보수 지시(여장1타)	증 1,824	건축부-5181 (`15.5.6)

4		감리원 검토보고

○ 서울 한양도성 흥인지문▪광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사 와 관련, 시공사에서 제출한 실정보고는 관련근거 및 단가가 적정하게 반영되어 설계 변경함이 타당하다고 판단됨.

5		처리의견

○ 문화재 감리원의 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 실정보고 승인처리코자 하며, 설계변경 소위원회에 상정코자 함.

붙 임 : 감리원 실정보고(한인감리 20*******01, 20*******03) 각 1부.  끝.