투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(중앙버스전용차로 흐름개선 건설폐기물처리용역)

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 중앙버스전용차로 흐름개선 건설폐기물처리용역에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약내용

o 공 사 명 : 중앙버스전용차로 흐름개선 건설폐기물처리용역

o 계약업체 : 금강도시환경㈜ 이상훈

o 계약금액 : 8,778,000원

o 계약일자 : 2015.10.12

나. 준공기한 연기

o 당    초 : 2015.12.20

o 변    경 : 2016.05.20

다. 연기사유 : 병행 공사 지연 및 겨울철 도로굴착 통제로 인한 공기부족

라. 연기사유 귀책소재 : 강서도로사업소

마. 지체상금 부과 여부 : 비부과

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.

3, 보고서 1부. 끝.

	도로보수과장
주무관	김동민		도로보수과장	11/25 김권일
협조자
시행	도로보수과-11416	(		)	접수		(		)
우	07520		/
전화		/전송		/		/	대시민공개