문서번호	시설보수과-4258
결재일자	2015.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	11/25 이종엽
협 조

준공기한 연기보고

[시조사삼거리 교차로구간 개선공사 1차분]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

성동도로사업소

(시설보수과)

준공기한 연기보고

우리 사업소에서 추진중인 ‘시조사삼거리 교차로구간 개선(청량제1고가 성능개선 포함)공사(1차분)’를 시행 함에 있어, 준공기한 연기사유가 발생하여 이에 대한 검토 보고임

Ⅰ		사업개요

공 사 명 : 시조사삼거리 교차로구간 개선(청량제1고가 성능개선 포함)공사

(장기계속)-1차분

공사기간 : 2014.12.18. ~ 2015.11.30.

도 급 비 : 1,851,000,000원(총차 3,586,560,000원)

도 급 자 : ㈜특수건설

Ⅱ		준공기한 연기

사  유

- 철도관련 업무협의 및 지장물 이설협의 지연으로 159일이 소요되어 본 공사(실 착공일 2015.08.05.)의 절대공기가 부족한 실정임

기  간

- 당초 준공기한 : 2015.11.30.

- 변경 준공기한 : 2015.12.20.(20일 연장)

관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조

지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		조치의견

상기 보고내용과 같이 본 공사의 실 공사기간이 부족한 사항으로 준공기한을 연기 조치하여 공사의 내실을 기하고자 함.

붙임  감독기관 준공기한 연기 공문 1부. 끝.