투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 변경 요청(보차도용콘크리트블록-구로세무서)

1. 도로보수과-9382호(2015.10.1.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리사업소에서 시행하고 있는 구로세무서 앞 중앙버스정류소 이설공사에 소요되는 관급자재(보차도용콘크리트블록)의 납품기한을 아래와 같이 변경 요청합니다.

가. 건    명 : 관급자재 구매(보차도용콘크리트블록)

※ 납품요구번호 : 12-15-1-49313-00

나. 납품기한

- 당초 : 2015. 12. 20

- 변경 : 2016. 5. 20

다. 구매내역

품 명	물품 식별번호	규 격	단위	단 가 (원)	수량	비고
콘크리트블록	21983275	보차도용콘크리트블록, 성덕콘크리트 SD-049, 200×200×60mm, 크리톤200, 투수, 보도용, 컬러(백색 /황토색외)	㎡	26,400	434	변경없음

라. 변경사유 : 겨울철 도로굴착 통제에 따라 구로세무서 앞 중앙

버스정류소 이설공사의 준공기한이 연기됨에 따라 관급자재의

납품기한 변경 요청

마. 예산과목 : 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스이용제고,                       중앙버스전용차로흐름개선, 시설비.

붙임 : 구로세무서 앞 중앙버스정류소 이설공사 준공기한 연기 검토보고 1부. 끝 .

	도로보수과장
주무관	김동민		도로보수과장	11/25 김권일
협조자
시행	도로보수과-11407	(		)	접수		(		)
우	07520		/
전화		/전송		/		/	대시민공개