투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	중랑구청장(건설관리과장)
(경유)
제목	일시도로점용허가 변경(연기) 요청

1. 중랑구 건설관리과-24154(2015.11.16.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 『면목천복개구조물 보수공사』와 관련하여  도로점용공사를 위한 일시도로점용허가에 대하여 아래와 같이 변경(연기) 요청하오니  조치하여 주시기 바랍니다.

가. 허가번호 : 중랑구 2015-508

나. 수허가자 : 성동도로사업소장

다. 점용장소 : 면목천로

라. 점용목적 : 면목천 복개구조물 상부 포장공사

마. 점용면적 : 4,921㎡

바. 점용허가기간 :

- 당초 :  2015.11.20. ~ 2015.11.28.(총 9일)

- 변경 :  2015.11.20. ~ 2015.12.07.(총18일)

사. 변경사유 : 공사기간 중 우천으로 인한 공사연기. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
★주무관	최태석		시설보수과장	전결 11/25 박춘배
협조자
시행	시설보수과-4254	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동)	/
전화	02-2210-1555	/전송	02-2210-1562	/	choitaeseog@seoul.go.kr	/	대시민공개