문서번호	기반시설과-1739
결재일자	2015.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이우헌		한흥태	11/25 박상돈
협조

분수공사관련 추가 보수사항 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

보 고 서

『2015년 한강분수 유지보수 공사(연간단가)』업무 수행중 추가 보수사항 발생에 대한 보고임.

□ 공사개요

◯ 공 사 명 : 2015년 한강분수 *지보수 공사(연간단가)

◯ 계약금액 : ***백만원

◯ 도급자 : 형진조경(주) 대표 강이호

◯ 착공일자 : 2015. 3. 30

◯ 준공기한 : 2015. 12. 31

◯ 공사내용 : 뚝섬 음악분수외 10개소 기계, 조명, 제어설비 등 유지보수

□ 추가 보수내용

◯ 사유 : 한강분수 시설 유지보수 감독업무 수행중 분수시설 점검 및 확인 결과         보수가 필요한 물량 발생

시 설 명	공 종	보 수 내 용	소요예산	비고
계			157백만원
뚝섬 음악분수	스윙장치	스윙장치(20개) 수리(교체)	77백만원
	워터컨트롤밸브교체	56개 교체	37백만원
뚝섬벽천분수	수중모타펌프	15마력 모타교체	5백만원
여의도 수상	수중모타펌프	35마력 펌프교체	15백만원
달빛무지개분수	스피커 수리	스피커셋팅 및 보정	8백만원
뚝섬음악분수외	연출곡 음량조정,분전반 등	연출곡 음량 프로그렘 재설정,신규분전반설치 등	15백만원

◯ 보수가 필요한 대상

□ 예산검토

◯ 2015년 공공운영비 예산활용(157백만원)

□ 조치내용

◯ 상기와 같이 보수가 필요한 보수 물량에 대하여 도급자로 하여 우선

보수토록 하고, 추후 설계변경에 반영코자 합니다.  끝.