문서번호	교통운영과-22900
결재일자	2015.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		신호운영팀장	교통운영과장
장철수		고광섭	11/25 代심혁보
협 조
	주무관			최용덕
	주무관			이개동
	주무관			권혁주

2015년 교통신호제어기 유지보수 용역

계약금액 변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  11

교통운영과

(신호운영팀)

2015년 교통신호제어기 유지보수 용역

계약금액 변경 보고

2015년 교통신호제어기 유지보수 용역 추진 중, 계약일 지연으로 인하여 당초 계획된 용역계약기간(306일)에 비해 계약기간이 감축되었기 계약금액에 대하여 변경설계 시행하고자 함

Ⅰ

용역개요

사 업 명 : 2015년 교통신호제어기 유지보수 용역(4개 권역)

권역별 계약내역

			(단위 : 원)
권역별	계약업체	계약금액		계약일자	용역기간
동북권역	진우산전(주) 정진태	600,564,210		2015.03.10	2015.03.10 ~ 2015.12.31
동남권역	(주)파워일렉 이정림	600,831,160		2015.03.10
서북권역	(주)대한신호 안종석	605,529,890		2015.03.10
서남권역	㈜신호 양준모	601,165,000		2015.03.10
	계	2,408,090,260

Ⅱ

변경설계사항(계약금액)

계약금액 변경내용

			(단위 : 원)
권역별	계약금액			증 감
	당 초	변 경
동북권역	600,564,210	582,740,219		- 17,823,991
동남권역	600,831,160	583,096,020		- 17,735,140
서북권역	605,529,890	587,558,920		- 17,970,970
서남권역	601,165,000	583,337,267		- 17,827,733
계	2,408,090,260	2,336,732,426		- 71,357,834

변경일수

권역별	계약기간		증 감
	당 초	변 경
동북권역	306일	297일	9일
동남권역	306일	297일	9일
서북권역	306일	297일	9일
서남권역	306일	297일	9일
계	1,224일	1,188일	36일

변경사유

당초 306일(2015.03.01~2015.12.31)로 계약이행기간으로 발주하였으나,

계약지연(2015.03.10계약)으로 인하여 297일로 되어 당초 계약기간보다 9일이 감축되어 계약이행기간이 297일(2015.03.10~2015.12.31)로 변경됨에 따라 용역비(감) 변경설계

Ⅲ

조치방안

계약금액 변경이 타당하다고 사료되므로, 계약업체로부터 합의각서 징구하여 재무과 협조 계약금액변경 감액하고자 함

붙임 : 1. 설계변경내역서 각 1부

2. 합의각서       각 1부.  끝.