문서번호	조경과-6255
결재일자	2015.11.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

					시 민
★주무관	주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
이원숙	김효준	강인호	심상원		11/26 송천헌
협 조
	총무과장			代백철
	주무관			이상균

2015년 식물 연간단가 계약 변경 계획

2015. 11.

서울대공원

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 식물 연간단가 계약 변경 계획

우리 공원의 화단을 계절별로 다양하게 조성하고자 적기에 식물을 구매할 수 있도록 단가계약을 체결한 것과 관련하여 계약 물량 정산에 따른 내역 조정을 위해 변경 계약을 시행하고자 함

Ⅰ		구매 개요

❍ 구 매 명 : 2015년 식물 연간단가

❍ 계약기간 : 2015.3.26.~12.18.

❍ 식재위치 : 테마가든, 식물원 및 동물사, 동물원 내 화단, 광장, 녹지대 등

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰

- 입찰자격 : 농업협동조합 또는 영농조합법인

- 지역제한 : 서울

❍ 계약물량 : 초화류 등 153종 123,495본

❍ 계약금액 : 금122,082,080원

❍ 계약업체 : 한강영농조합법인 대표 한행하

Ⅱ		그 동안 추진 경위

❍ 2015.02.23. : 구매 계획 수립

❍ 2015.02.24. : 계약 심사 의뢰

❍ 2015.03.11. : 구매 발주

❍ 2015.03.26. : 구매 계약 체결

Ⅲ		변경 내용

❍ 변경 사유 : 계약 물량 정산

- 현장 여건에 맞는 품종과 수량 변경

- 자체 재배한 식물 사용으로 물량 감소

❍ 변경 내역 : 세부내역 붙임 1 참조

구 분	변경 전	변경 후	비고
	153종 123,495본(㎡,분,병)	134종 154,276본(㎡,분)
초화류	42종 109,320본(㎡)	41종 139,101본(㎡)
관엽류	54종 8,190분	45종 4,538분
동서양난	12종 1,445분(병)	8종 1,490분
허브류	20종 2,740본	19종 3,397본
쌈채소	15종 1,500본	15종 3,750본
야생화	10종 300본	6종 2,000분

Ⅳ		변경 금액

❍ 변경 금액

변경 전	변경 후	증 액	비고
122,082,080원	119,909,600원	감 2,172,480원

❍ 예산 과목(재료비)

- 공원이용시민만족도향상, 다양한축제및볼거리프로그램운영, 장미원 유지관리

- 공원이용시민만족도향상, 다양한축제및볼거리프로그램운영, 식물전시및축제프로그램

- 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 꽃동산조성및녹지조경시설물유지관리

- 공원이용시민만족도향상, 동물사관리기능및야생동물종보전, 식물원및동물사조경관리

Ⅴ		향후 계획

❍ 2015.11.26. : 계약업체와 합의각서 체결

❍ 2015.11.27. : 시 재무과에 변경 계약 의뢰

붙 임 : 1. 2015년 납품 내역 1부

2. 변경 내역서 1부

3. 합의각서 1부. 끝.