문서번호	자원순환과-19172
결재일자	2015.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
안종호		정연구	11/26 이인근
협조

강남자원회수시설 가연성폐기물 선별시설 설치

기본계획 용역 추진 계획

2015. 11

기후환경본부

(자원순환과)

강남자원회수시설 가연성폐기물 선별시설 설치

기본계획 용역 추진 계획

강남자원회수시설 내 가연성폐기물 선별시설을 설치하여 에너지 회수 및 소각량을 증대하고 생활폐기물 처리 환경변화에 능동적 대처 및 처리기반을 확고히 구축하고자 기본계획 수립 용역을 시행코자 함.

□ 추진근거

❍ 서울시 폐기물처리 혁신계획(시장방침 45, ‘14.3.6)

❍ 생활폐기물 자체처리기반 구축사업 변경 계획(시장보고 ‘15.10.05)

❍ 강남자원회수시설 가연성폐기물 선별시설 도입계획 변경

(부시장방침 399, ‘15.10.28)

□ 사업개요

❍ 설치위치 : 강남자원회수시설 관리동 지하1층 재활용집하장(폐기물처리시설)

❍ 처리규모 : 600 톤/일

❍ 중간 SRF 생산량 : 300 톤/일(투입량 대비 50%)

❍ 사업기간 : 2015. 10 ∼ 2018. 06

❍ 소요예산 : 200억원(설계비 포함)

□ 추진계획

❍ 용역개요

- 용 역 명 : 강남자원회수시설 가연성폐기물 선별시설 설치 기본계획 수립용역

- 추정가격 : 18,900천원

- 용역기간 : 계약일로부터 60일간

- 계약방법 : 수의계약

- 근거법령 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조                    제1항 제5호(추정가격 5천만원 이하)

- 수의계약사유 : 추정가격 2천만원 이하로 소액

- 용역사업자 : 벽산엔지니어링(주) 대표이사 함영승

❍ 주요 과업내용

- 사업의 개요

- 기초자료 조사

- 처리대상폐기물 발생 및 처리현황

- 기 수립된 타당성조사 재검토

- 가연성폐기물 기계적전처리시설 검토

- 기본계획

- 재정계획 및 사업방식 검토

- 운영관리계획

- 투자사업 심사자료 검토

- 관련법규 검토

- 종합판단 및 정책제언

❍ 예산과목 : 기후환경본부 자원순환과, 효율적인 폐기물처리, 안정적인 폐기물처리,                      가연성폐기물 선별시설도입(강남), 시설비 및 부대비(401), 시설비                      (401-01)

□ 향후 일정

❍ 2015. 11. : 수의계약 의뢰(재무과)

❍ 2015. 12. ∼ ‘16. 1. : 기본계획 용역 시행

❍ 2016. 02. ∼ 03. : 투자사업 재심사(재정관리담당관)

❍ 2016. 04. ∼ 09. : 기본설계 및 입찰안내서 작성

❍ 2016. 10. ∼ ‘18. 06. : 실시설계 및 공사 시행

붙임 : 과업지시서 및 용역비 산출내역서 각 1부.  끝.