투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기 요청[북부간선도로 묵동IC 과속단속장비 설치공사]

1. 기전과-8313호(2015.11.26.)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인『북부간선도로 묵동IC 과속단속장비 설치공사』에 대하여 아래와 같이 변경계약(준공기한 연기) 의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

공 사 명	북부간선도로 묵동IC 과속단속장비 설치공사
계 약 자	㈜진우산전 정진태
공사기간	2015.07.27.~2015.11.30.
계약금액	52,389,458원(변경없음)
계약번호	20150*******00

나. 연기귀책사유 : 서울특별시 성동도로사업소

다. 공사기간 연기

- 변경전 : 2015.07.27.~2015.11.30.

- 변경후 : 2015.07.27.~2015.12.31.

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

마. 예산과목 : 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 도시고속도로 소통강화, 도시고속도로 기능개선, 시설비(401-01)

붙     임 : 1. 준공기한 연기 보고 1부.

2. 준공연장합의서 각 1부. 끝.

	기전과장
주무관	신대중		주무관	代신대중		기전과장	11/26 최주용
협조자
시행	기전과-8314	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1545	/전송	20-2210-1536	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	대시민공개