문서번호	주거환경개선과-12064
결재일자	2015.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		저층주거지관리팀장	주거환경개선과장
이동호		김만호	11/26 박경서
협 조
	주무관			임동수

북한산고도지구 도시재생 및 시범사업 종합계획수립 용역설계변경 검토보고

2015.12

도시재생본부

(주거환경개선과)

북한산고도지구 도시재생 및 시범사업 종합계획수립 용역설계변경 검토보고

북한산 고도지구 도시재생 및 시범사업 종합계획 수립 용역 과업을 수행하는 과정에서 설계변경 사항(공기연장, 감액)이 있어 검토 보고 드림.

Ⅰ		추진 경위

❍ ‘14.09.02  도시재생 종합계획수립 및 시범사업추진 방침

❍ ‘14.12.08  용역 계약체결

❍ ‘14.12.22  용역 착수 도봉구청장 보고, 강북구청장 보고(12.23)

❍ ‘15.11.24  과업기간 연장 및 계약금액 변경 요청

Ⅱ		용역 개요

❍ 전체 개요

계약 건명	계약자	용역비	과업기간
북한산 고도지구 도시재생 및 시범사업 종합계획수립 용역	㈜동림피엔디 동림건축사사무소	780,000천원	‘14.12.08 ~’15.12.07

❍ 과업 내용

- 현황 조사 및 계획과제 도출

- 도시재생 기본구상 마련

- 주거환경관리사업 정비계획 수립

- 사업추진체계 정립 및 계획방향 구상(주민참여 기반조성)

Ⅲ		설계 변경 내용

□ 개  요

구 분	당 초	변 경	비고(증감)
과업기간	‘14년 12월 08일 ~‘15년 12월 07일	‘14년 12월 08일 ~‘16년 03월 31일	116일 연장
계약금액	780,000,000원	767,900,000원	감 12,100,000원

□ 변경 사유

❍ 공기 연장

- 주민워크숍을 통한 계획수립 중 중동호흠기증후군(MERS)의 발생으로 당초 계약기간 내에 과업 완료가 어려워 계약기간 연장을 요청함.

❍ 금액 변경

- 계약금액에 심포지엄 및 자문회의 비용이 책정되었으나, 심포지엄 취소 및 자문회의 회수 조정에 따라 계약금액을 조정함.

□ 조치 계획

❍ 설계변경 : 준공기한 연기, 계약금액 감액 변경

❍ 연기사유 귀책소재 : 우리시

❍ 지체상금 : 미부과

Ⅳ		향후일정

❍ ‘15. 12   :  중간보고

❍ ‘15.  2   :  최종보고

❍ ‘15.  3   :  설계변경 의뢰 및 용역준공(재무과)

붙임 : 1) 설계변경 요청 공문, 합의서, 설계변경 내역서 각1부

2) 계획공정표(기정/변경) 끝.