문서번호	설비부-524
결재일자	2014.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김은덕		권오식	01/15 박기형
협조
	경리과장		최영미

『잠원2빗물펌프장 신설 전기공사』

관급자재(수배전반) 납품기한 연기 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 01.

도시기반시설본부

(설  비  부)

『잠원2빗물펌프장 신설 전기공사』

관급자재(수배전반) 납품기한 연기 검토

우리 본부에서 추진 중인 『잠원2빗물펌프장 신설 전기공사』 현장 여건 변경으로 관급자재(수배전반) 납품기한을 연기하고자 함

관급자재(수배전반) 계약현황

계약자	품명	계약금액	납품기한	계약일자
㈜동보파워텍	배전반 1식	총차:820,000,000원 1 차:278,969,460원	총차:2014. 6. 30. 1 차:2014. 2. 10.	2012.5.13.

관련근거

잠원2감 2014-18호(2014. 1. 13.) “전기공사 지급자재(수배전반) 납품기한 연기 요청”

검토내용

변경내용

업체명	품명	계약번호	납품기한		비고
			당초	변경
㈜동보파워텍	배전반	121321037-00	2014.2.10	2014.6.30	1차

변경사유 : 토목공사 공기 연장으로 전기공사 관급자재 설치 시기 미도래

지체상금 부과 여부 : 미부과

조치의견

검토 내용과 같이 납품 기한이 변경되도록 경리부서(건설총괄부)에 조치 의뢰하고자 함

붙 임 : 감리단 공문 1부.  끝.