투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	조달물품 물량 변경계약 요청(시멘트)

1. 시설과-4307(2015.6.16.)호 및 공원운영과-11480(2015.6.19.)호 및 공원운영과-21203(2015.11.9.)호와 관련입니다.

2. 남산 회현자락 한양도성 보존・정비 및 공원 조성공사와 관련, 관급자재(시멘트) 구매 건에 대하여 아래와 같이 물량 변경계약 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 시멘트 조달구매(남산 회현자락 한양도성 보존・정비 및 공원 조성공사)

나. 변경내용

구분	물품식별 번 호	품명	규격	단 위	수 량	단 가	금 액(원)	비고
당초	21639833	시멘트	현대, 포틀랜드1종 포장시멘트40㎏	포	4,760	3,820	18,183,200	증) 323포 ( 증 1,233,860)
변경					5,083		19,417,060

다. 변경사유 :  현장여건 변화에 따른 물량 변경.

붙임 : 관급자재 확정수량(1차분) 보고 공문사본 1부.  끝.

품의필 NO 210(2015.11.26.) 시설과, 남상국

	시설과장
조경팀장	남상국		시설과장	11/26 代한종수
협조자
시행	시설과-8750	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02) 3783-5966	/전송	02) 3783-5969	/	namsg8535@seoul.go.kr	/	대시민공개