문서번호	전산정보과-11136
결재일자	2015.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
장병균		홍동섭	11/26 문윤기
협조
	주무관		백영희

Arisu인포시스템

e-러닝 콘텐츠 제작 사업완료 계획

2015.11

요금관리부

(전산정보과)

Arisu인포시스템

e-러닝 콘텐츠 제작 사업완료 계획

Arisu인포시스템 e-러닝 콘텐츠 제작과 관련하여 사업완료계획을 수립하여 업무에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		사업개요

○ 사업내용

- 아리수인포시스템 전반적인 흐름 및 사용법에 대한 12차시 내외 e-러닝 콘텐츠 제작

○ 사업기간 : 2015.08.12. ~ 2015.12.14

○ 계약금액 : 19,437,000원

○ 계약업체 : ㈜피엔아이시스템

○ 개설강좌 : 인재개발원 e-자유학습

Ⅱ		추진현황

○ e-러닝 콘텐츠 초안 작성 : ‘15.8.31∼9.10

○ 콘텐츠 1차시 프로토타입 시연 및 결과보고 : ‘15.10.21

- 콘텐츠 내용 이해하기 쉽도록 재작성 및 기존에 개설된 다른 e러닝 강좌처럼 제작 요구

○ 디자인시안 검토 및 결과보고 : ’15.11.4

- 현재 디자인시안으로 결정하고 학습목표와 학습정리에는 아리와 수리 캐릭터를 사용하고 그 이외는 남.녀 캐릭터로 대체

○ 콘텐츠 내용 수정안 작성 : ‘15.10.26∼11.4

○ 콘텐츠 스토리보드 작성 및 수정 : ‘15.11.3∼11.19

○ 콘텐츠 제작  : ‘15.10.26∼12.4

Ⅲ		추진계획

○ e-러닝 콘텐츠 제작완료에 따른 시연 및 검증

- 일  시 :‘15.12.8(화) 14:00∼16:00

- 장  소 : 본부 별관 3층 전산교육장

- 내  용 : 아리수인포시스템 시작하기, 수용가(계량기교체관리 /계량기종류변경/검침정보일괄변경), 자동납부 및 전자고지, 정기분 조정, 누수감액 처리, 수시분 조정, 수납 처리, 정기분 체납관리 등 12차시 e-러닝 사이버 학습 강좌

- 참석대상자(19명) : 각 수도사업소 요금과 1명,

본부 요금제도과 3명, 전산정보과 8명

○ 도출된 사용자 요구사항 반영 :‘15.12.9∼12.14

○ e-러닝 콘텐츠 제작 완료보고 : ‘15.12.15

○ e-러닝 콘텐츠 제작 준공검수 : ‘15.12.16∼17

○ 인재개발원 사이버교육 강좌개설 : ’16.1

Ⅳ		행정사항

○ 수도사업소 요금과, 요금제도과

- e-러닝 콘텐츠 시연 및 검증에 따른 참석대상자 명단 제출(15.12.2)