서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	관급자재(아스팔트콘크리트) 수량 변경 요청

1.재무과-43891(2015.9.3)호 관련입니다.

2.우리 과에서 시행 중에있는 “동호대교 보수공사”에 소요되는 관급자재(아스팔트콘크리트) 수량 변경을 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재(아스팔트콘크리트) 수량 변경 요청 내역

계약건명	계약 번호	품명	규 격	단위	수량			수량 변경 사유	비고
					당초	변경	증감
아스팔트 콘크리트 구매 (동호대교 보수공사)	20150846308 (계약업체- 중앙아스콘㈜	아스 팔트 콘크 리트	WC-6 13mm 1등급 PG76-22 표층용	톤	1,074	870	감)204	- 동호대교 포장 물량 정산	계약금액 ►당초 합계:122,489,700원 ►변경 합계:99,223,500원 감)23,266,200원

나. 예산과목 : 교량관리, 한강교량관리, 동호대교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비.  끝.

	교량안전과장
주무관	우창원		특수교량팀장	이수근		교량안전과장	11/26 代하현석
협조자
시행	교량안전과-5636	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1954	/전송	02-2133-1429	/	wcw1000@seoul.go.kr	/	대시민공개