문서번호	토목부-25031
결재일자	2015.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	11/26 代서관석
협조

감리용역(총괄18회,12차2회) 변경 검토보고

(방화대교 남단 접속도로 건설공사 전면책임감리용역)

2015. 11.

도시기반시설본부

(토목부)

감리용역(총괄18회,12차2회)변경 검토보고

(방화대교 남단 접속도로 건설공사 전면책임감리용역)

「방화대교 남단 접속도로 건설공사」공사기간이 연장됨에 따라 감리원 배치계획 변경 및 용역기간 연장 검토 보고임

1		관련근거

❍ 삼보 2015-1335호(2015. 11. 20.) 설계변경 요청

❍ 토목부-22355호(2015.10.26.) 시설공사 공기연장 검토보고

2		용역개요

❍ 위    치 : 강서구 방화동 ~ 올림픽대로

❍ 규    모 : 도로개설 B=5.75~18.0m, L=3,021m

(교량 756m, 터널 949m,  토공도로 1,316m)

❍ 용역기간 : 총괄 2005.10. 5. ∼ 2015.11.30.(12차 2015. 1. 1. ~ 2015.11.30.)

❍ 용 역 비 : 총괄 6,433백만원(12차 719백만원)

❍ 감 리 사 : ㈜삼보기술단

3		감리단 제출내용

❍ 주요내용

- 감리용역 진행중 시설공사 공기연장에 따른 투입계획 변경

- 12차분 보조감리원 투입계획 변경

❍ 총괄 변경내용

-  감리원 투입계획 변경                                                    (단위 : 일)

구 분	당 초	변 경	비 고
수석감리사	1,574	1,595	증 21(토목)
감리사	1,248	1,269	증 21(토목)
감리사	409	333	감 76(구조)
감리사보	3,629	3,528	감 101(토목)
감리사보	532	596	증 64(전기)
감리사보	115	118	증 3(조경)

-  용역비 및 용역기간 변경현황                                             (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
용 역 비	6,645,500,000	6,611,900,000	감 33,600,000
용역기간	2005.10.7. ~ 2015.11.30.	2005.10.7. ~ 2015.12.31.	증 1개월

❍ 12차 변경내용

-  감리원 투입계획 변경                                                    (단위 : 일)

구 분	당 초	변 경	비 고
수석감리사	230	251	증 21(토목)
감리사	409	430	증 21(토목)
감리사	198	122	감 76(구조)
감리사보	343	242	감 101(토목)
감리사보	86	150	증 64(전기)
감리사보	85	88	증 3(조경)

-  용역비 및 용역기간 변경현황                                             (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
용 역 비	931,700,000	898,100,000	감 33,600,000
용역기간	2015. 1. 1. ~ 2015.12.31.	2015. 1. 1. ~ 2015.12.31.	증 1개월

4		보고자 검토 및 조치의견

❍ 상기 감리단 보고내용 검토결과 시설공사 공사기간 연기에 따라 감리용역 기간 및 감리원        배치일수 조정이 필요하며

❍ 상기 사항에 대하여 변경계약을 체결하여 원활한 사업을 추진하고자 함

❍ 총괄 및 12차 변경계약 내용                                        (단위 : 원)

구 분	용 역 비		용 역 기 간		비 고
	당초	변경	당초	변경
총 괄	6,645,500,000	6,611,900,000	2005.10. 7. ~ 2015.11.30.	2005.10.7. ~ 2015.12.31.
12 차	931,700,000	898,100,000	2015. 1. 1. ~ 2015. 11.30.	2015. 1. 1. ~ 2015.12.31.

붙 임 : 1) 감리사 설계변경 요청서 1부.

2) 시설공사 준공기한 연기 검토보고 1부.  끝.