문서번호	계획설계과-2408
결재일자	2015.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	계획설계과장	급수부장	상수도사업본부부본부장
최영서	박기범	이규상	11/26 정중곤
협 조

‘2020 서울특별시 물 수요 관리 종합계획 학술용역’

준공기한 연기 보고

2015. 11.

상수도사업본부

(급 수 부)

작 성 자	급수부장 : 이규상 ☎3146-1401 계획설계과장 : 박기범 ☎1410 담당 : 최영서 ☎1417

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

‘2020 서울특별시 물 수요 관리 종합계획 학술용역’

준공기한 연기 보고

‘2020 물 수요 관리 종합계획 학술용역’과 관련하여 환경부 승인 검토, 검토사항 보완 등 처리기간이 소요되어 용역기한을 연기하고자 함.

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 2020 서울특별시 물 수요 관리 종합계획 학술용역

□ 용역기간 : 2015. 3. 25. ~ 2015. 12. 31.

□ 용역업체 : (재)서울연구원 대표 김수현

○ 용역수행 : 선임연구위원 김영란

□ 계약금액 : 273,850천원(예산액 325,000천원)

Ⅱ		추 진 경 위

□ 학술용역 착수                                      : ’15. 3. 25.

□ TF팀 회의                                         : ’15. 4.  1.

○ 참석자(13명) : TF팀원

○ 주요내용 : 기초자료 작성·제출에 대한 소관부서 협의 및 의견 수렴

□ 착수보고회 개최                                    : ’15. 5.  4.

○ 참석자(26명) : 부본부장, 급수부장 등 TF팀원 21명, 분야별 자문위원 4명

○ 주요내용 : ’15년 물 수요 관리 종합계획 목표량 달성 평가 및

’20년 물 수요관리 종합계획 연구방법 등

□ 1차 중간보고회 개최                                : ’15. 9.  3.

○ 참석자(26명) : 부본부장, 각부 부장(4명), 서울물연구원 부장 2명,

TF팀원 16명, 분야별 자문위원 3명

○ 주요내용 : 물 수요 관리 단위 및 관리단위별 물사용 특성 등

□ 2차 중간보고회 개최                                : ’15. 11. 16.

○ 참석자(19명) : 부본부장, 급수부장, 서울물연구원 미래전략연수센터장 등 2, TF팀원 13명, 분야별 자문위원 2명

○ 주요내용 : 기후변화 적응의 가뭄대책 물 수요 관리 등

Ⅲ		준공기한 연기 사유

□ 환경부 승인 검토 및 검토사항 보완에 따른 처리기간 소요

○ 수도법 제6조(물 수요 관리 목표제의 실시)에 따라 본 종합계획을 환경부장관(수도정책과)에게 승인받아야 하며, 환경부장관은 종합계획을 승인하기 전에 국토교통부장관과 협의하여야 하는 등 여러절차가 남아있어 용역기간을 3개월 연장하고자 함.

※ ‘2015 물 수요 관리 종합계획’ : 승인까지 2.5개월 소요

· 용역기한 연기 : 당초 ’11. 12. 31. → 변경 ’12. 2. 29.

※ ‘서울시 물 재이용 관리계획’(시 물순환정책과) : 승인까지 2개월 소요

· 용역기한 연기 : 당초 ’12. 12. 31. → 변경 ’13. 2. 25.

○ 용역기간 : (당초) ’15. 3. 25. ~ ’15. 12. 31.

(변경) ’15. 3. 25. ~ ’16.   3. 31.(3개월 연장)

※ 지체상금 부과 여부 : 미부과

- 2015. 12월 중 환경부에 승인 요청하고 승인 통보에 따라 준공처리(조건부 승인 시 서울연구원에서 최종 보완처리).  끝.