투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	(주)에이큐건설 대표 김재용 귀하(158-811 서울특별시 양천구 공항대로 503 3층)
(경유)
제목	「중랑캠핑숲 조성공사」 공사비 환수 독촉 통보 (에이큐건설)

1. 2010년 준공한 「중랑캠핑숲 조성공사」 와 관련입니다.

2. 위 공사와 관련하여 우리시 감사결과(2012.9.13~10.12) 공사비 정산 부적정 등으로 과다 지급된 공사비를 환수하고자 시설과-7854(2013.11.7.)호 문서로 통보한 건이 납부되지 않아 독촉고지하니, 기한 내 납부하시고 반드시 우리 사업소로 납부 영수증을 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 기한 내 납부되지 않을 경우 관련법규 절차에 따라 재산압류 등 처분할 예정이오니 불이익을 받지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 중랑캠핑숲(중랑생태문화공원) 조성공사

나. 공사기간 : 2009. 04. 28. ~ 2010. 11. 20.

다. 준공금액 : 금10,168,169,000원

라. 환수금액 : 금35,553,190원 (총 48,703,000원 중 도급비율 73%)

마. 환수사유 : 공사비 정산 부적정 등으로 과다 지급된 공사비 환수

(단위:천원)

공 종	준공금액	재정산	과다지급액	비 고
계			48,703
성곽석쌓기	255,702	249,543	6,159
합판거푸집	67,793	65,856	1,937
산석쌓기	172,710	166,668	6,042
주목식재	-	-	10,410	설계변경 시 주목단가 과다지급
탄성포장	-	-	24,155	제3자단가계약물품을 도급공사에 포함하여 공사비 과다지급

바. 납부방법 : 첨부된 부과고지서에 의거 기한내 납부(영수증 사본제출)

사. 납부기한 : 2014년 1월 31일 까지

첨   부 : 고지서 1부.  끝.

	중부공원녹지사업소장
주무관	이동헌		시설과장	01/15 함석주
협조자
시행	시설과-281	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산별관2층	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02)3783-5919	/전송	02)3783-5969	/	oil0824@seoul.go.kr	/	대시민공개