문서번호	교통운영과-23095
결재일자	2015.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		신호시설팀장		교통운영과장
박지웅		김균호		전결 11/27 강진동
협 조

『내곡지구 택지 및 양재동시프트 교통신호기공사 감리 용역』

준공기한 연기(2차) 보고

2015. 11

도시교통본부

교통운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

「내곡지구 택지 및 양재동시프트 교통신호기공사 감리 용역」

준공기한 연기(2차) 보고

내곡지구 택지 및 양재동시프트 교통신호기공사(원인자 공사)의 선행공정(토목)지연 및 추가규제로 인한 준공기한 연기에 따른 당해 공사감리용역의 준공기한을 연기하고자 합니다.

Ⅰ		용역개요

용역개요

【단위 : 원】

용역명	용역기간	공사비	계약금액	계약업체	비고
내곡지구 택지 및 양재동시프트 교통신호기공사 감리 용역	′13.9.10. ~ ′15.11.28.	1,410,306,078	133,905,000	대영유비텍㈜ 대표 조근환	공사비 (감리비 산출대상)

※ 공사비 : 용지비, 보상비, 법률수속비 및 부가가치세를 제외한 일체의 공사비

Ⅱ		준공기한 연기

준공기한 연기 내용

구분	준공기한			비고
	변경전	변경후	증감일
내곡지구 택지 및 양재동시프트 교통신호기공사 감리 용역	2015.11.28.	2016.05.31.	증)185

준공기한 연기 사유

준공기한 연기 사유 : 내곡지구 택지 교통신호등 공사의 선행공정(토목) 지연 및 추가규제로 인한 준공기한 연기에 따른 공사감리용역의 준공기한을 연기하고자 함.

준공기한 연기 세부내용

내곡지구 택지 교통신호등 공사 변경계약 내역

공사명	계약내역				비고
	변경전		변경후
	계약일	준공기한	계약일	준공기한
내곡지구 택지 교통신호등 공사	2012.10.25.	2015.11.28.	2012.10.25.	2016.05.31.	증)185일

향후계획

재무과로 변경계약 의뢰

붙임  1. 감리용역 실정보고서 및 합의각서 각1부.

2. 증빙자료 1부.  끝.